문서번호	도시철도설비부-6220
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	06/29 구자훈
협 조
	신호과장		구봉서

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고

2018. 6.28

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고

철도종합시험운행 시행지침에 따라 9호선 3단계 시설물검증시험을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

❍ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제 13조

❍ 시험기간 : ´18. 6.27. ~ ´18. 7.27(23일간) ※(토.일 제외)

❍ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주) 3단계 개통 준비단]

❍ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[시설물검증시험 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

❍ 시설물검증시험 내용

계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
97	4	5	12	66	10

※ 시험항목은 국토부 철도종합시험운행 시행지침 [별표 2] 시설물검증시험

점검 항목을 준용.

❍ 추진일정

시설물검증시험		시험결과 검토		시정명령통보
´18.6.27~7.27	⇨	´18.7.30~8. 3	⇨	´18. 8. 3	⇨
서울시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전 개시
´18. 8. 6	⇨	´18. 8. 7	⇨	´18.8.10~9.30
서울시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시험 결과

❍ 시운전 일시 : ´18. 6.28(목) 09:15 ~ 16:00

- 급전(08:55)   - 단전(16:25)

❍ 시험결과(97개 시험항목중  신호2개 시험완료)

- 신호 1개항목 시험결과 이상없음

- 신호(정위치 정차시험은 종료시까지 계속 추진, 이상없음)

- 궤도 3개항목은 야간(6.27~6.28)에 실시, 결과는 1주일 소요됨.

❍ 시험내용

- 신호(ATS 정차 유지 확인시험)

↳ 지상 ATC 장치가 지정된 TZ(전송지역)를 통해서 ATS 정차 유지 요청을

전송하는지 확인하는 시험임.

- 신호(정위치 정차시험)→ 시설물검증종료시까지 계속 추진

↳ 각 역의 정위치 정차 지점에서 정확하게 정차하는지 확인하는 시험임.

- 궤도(궤도검측, 육안검사, 레일탐상검사)

↳ 궤도설치 완료 후 차량의 운행에 있어서 궤도 시설물이 제성능을

발휘할 수 있는 지 여부를 확인하기 위한 시험임.(야간시행)

❍ 투입(탑승)인원 : (목요일) 13명 / (누계) 25명

투입일	서울시	철도운영자	감리 및 시공사	교통안전공단
18.6.28(목)	1	4	6	1

❍ 투입차량

투입일	투입편성수	주 박	기관사	정위치정차
18.6.28(목)	6량 1편성 (9039)	931역 부근 주박	1명	양호

Ⅲ		익 일 계 획

❍ 시운전일시 : ´18. 6.29(금) 09:30 ~ 17:00

❍ 시험 항목

- 신호 1개 항목 시험(주간)

- 궤도 3개항목[야간 6.28~6.29) 실시, 결과는 1주일 소요됨.

❍ 시험내용

- 신호 : 역 무정차 통과(SKIP STION) 확인

↳ 지상 ATC 장치가 요청에 의해 역 무정차 통과 요청을 전송하는지 확인하는 시험임.

· 차상 ATC 장치가 무정차 통과 정보를 수신하고, 다음역을 통과하는 시험.

- 궤도(궤도검측, 육안검사, 레일탐상검사)

↳  궤도설치 완료 후 차량의 운행에 있어서 궤도 시설물이 제성능을

발휘할 수 있는 지 여부를 확인하기 위한 시험임.(야간시행)

❍ 시험열차 투입 : 6량 1편성(2단계 열차 및 기관사)

❍ 투입(탑승)인원 : 서울시 1명, 철도운영자 1명, 기관사 2명,

감리 및 시공사 등 5명

붙 임 1. 시설물검증시험일지(신호) 관련자료 1부 .

2. 시설물검증시험 결과 현황 1부.

3. 시설물검증시험 일정표 1부.  끝.