＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약시행(암사1정수장 여과지 역세척배관 교체공사)

1. 계약번호20180401E6E-00호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 시행중인 『암사1정수장 여과지 역세척배관 교체공사)』에 대하여 아래와 같이 변경계약 코자 합니다.

가. 공 사 명 : 암사1정수장 여과지 역세척배관 교체공사

나. 공사기간 : 2018. 4. 4. ~ 2018. 8. 2.

다. 계약금액 : 금1,232,800,000원

라. 계 약 자 : 대한기술용역(주) 대표 곽상인

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

바. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 3년

사. 변경 내역

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ∙ 감
계약금액	1,232,800,000원	1,187,540,000원	감)45,260,000원

아. 변경사유 : 보험료 정산

※ 2018. 6.28. 감추산필 (번호 5838, 2018. 3. 8)

붙 임 :  1. 변경내역서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 계약금액조정검증확인서.  끝.

주무관	김재성		주무관	김덕기		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	06/29 代하은경
협조자	주무관	변민용
시행	정수시설과-5434	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)