투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제 목	교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 기간연장 승인 요청

1. 성동도로사업소 도로보수과-1488호(2018.04.20.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중에 있는“천호대로(광나루역) 확장공사”와 관련하여   교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 승인사항을 아래와 같이 변경 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바람니다.

가. 아 래

구 분	당 초		변 경
사 업 명	교통안전시설물(노면표시)원인자 부담공사		좌 동
사 업 지 위 치	광진구 아차산역사거리~천호대교 남단IC		좌 동
공 사 기 간	‘12.03.13 ~ 2014.02.20.		‘12.03.13 ~ 2018.12.20
업 체 명	설계업체	㈜진우엔지니어링코리아	좌 동
	감리업체	대영유비텍(주)	좌 동
	시공업체	㈜신한개발	좌 동
공 사 내 역	노면도색 : 105,500m 노면제거 : 32,772m		좌 동

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권순환		교량건설과장	박용택		토목부장	07/02 김영수
협조자
시행	토목부-11410	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2577	/전송	3708-2599	/	ksh1216@seoul.go.kr	/	부분공개(5)