위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	1종교량 보수보강공사 건설사업관리단 책임기술자 귀하
(경유)
제목	작업기간 연기 승인(2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남))

1. 1종교량 제18-183호(2018.6.28.)와 관련입니다.

2. 위 호로 작업요청(4차)에 대한 작업기간 연기요청 검토보고에 대하여 아래와 같이

승인하오니 공사 연기로 인하여 시민 불편이 발생하지 않도록 관리에 만전을 기하여

주시기 바랍니다.

가. 승인내역

1) 작업기간 : 당 초  2018.4.17. ~ 6.30

변 경  2018.4.17. ~ 7.31

2) 작업내용 : 선유고가 국회대로 방향 토공부 포장

3) 변경사유 : 아스콘 출하 시기 조정에 따른 포장공사 순연. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전재형		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	07/02 한유석
협조자
시행	교량안전과-11565	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2층 교량안전과	/
전화	02-2133-1975	/전송	02-2133-1429	/	jahe2000@seoul.go.kr	/	대시민공개