투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역-3차분)

우리부에서 추진중에 있는 「서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역-3차분」 의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역(3차분)

나. 용 역 비 : 72,887,000원(총차 509,508,400원)

다. 용역기간 : 2017.7.4 ~ 2018.7.3(총차 '19. 4. 3)

라. 도 급 사 : (주)건용환경개발

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 서초역~방배로간 도로확장,                              시설비

바. 준공기한 연기

1) 당초 : 2017.7.4 ～ 2018.7.3

2) 변경 : 2017.7.4 ～ 2018.10.19(108일 연장)

사. 연기사유 : 시점부(내방역 측) 다수 민원발생으로 공정계획에 차질이 발생되어 3차 계약물량의 집행시기 미 도래로 용역기간을 연기하고자 함.

붙임  1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	고광호		치수시설과장	조성만		방재시설부장	07/02 이임섭
협조자	대금시스템과장	박환
시행	방재시설부-8661	(		)	접수		(		)
우	04524	중구 청계천로8(무교동 96번지)프리미어플레이스 빌딩 14층	/
전화	02-3708-8772	/전송	02-3708-8756	/	kkhh640@seoul.go.kr	/	대시민공개