투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2018년 이촌한강공원 족구장 조성공사

1. 녹지관리과-2651(2018.6.22.)호와 관련입니다.

2.「2018년 이촌한강공원 족구장 조성공사」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을

체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	2018년 이촌한강공원 족구장 조성공사
계약상대자	태림조경(주) (대표 : 정명선)
계 약 금 액	금19,368,000원(금일천구백삼십육만팔천원)
계 약 일 자	2018.05.23.
공 사 기 간	2018.05.23. ~ 2018.06.21.

나. 변경내역 : 기간 변경(2018.05.23. ~ 2018.07.13.)

변 경 내 역	변경전	변경후
기 간 변 경	2018.05.23. ~ 2018.06.21.	2018.05.23. ~2018.07.13.

다. 변경사유 : 공사에 소요되는 관급자재 중 당초 설계한 고정식 휀스를 이동식                      휀스로 변경하기 위한  검토에 시일이 시일이 소요되는 등 공사                       지연으로 준공기한을 연기하고자 함.

붙   임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 공사 계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	07/02 박기용
협조자
시행	총무과-8865	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)