투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(동북권사업단장)
(경유)
제목	업무 협조 요청 (창동역 고가하부 예술공방 조성공사)

1. 동북권사업단-11537(2017.11.23)호와 관련입니다.

2. 귀 본부의 공사의뢰에 따라 우리본부에서 긴급발주한 “창동역 고가하부 예술공방 조성공사”와 관련하여 교통규제심의, 가설건축물축조 허가(협의) 등 제반 행정처리 미이행으로 공사 착수가 지연되고 있으니 당해 공사가 조속히 착공될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 공사 착수지연으로 인해 향후 공사기간이 연장 될 수 있음.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정빈		의료시설과장	이형재		건축부장	07/03 임인구
협조자
시행	건축부-9172	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	ljbeen@seoul.go.kr	/	대시민공개