투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	행당제6구역 주택재개발 정비사업조합장
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 변경 승인

1. 행당 2018-137호(2018.06.29.)와 관련입니다.

2. 「행당6구역 주택재개발 정비사업 주변 교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 공사기간 연장요청건」에 대해 아래와 같이 승인하오니,

3. 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방서」 규정에 따라 공사를 시행하여 주시고 공사완료 후 T-GIS시스템 입력 및 준공확인을 요청하시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공 사 명		행당6구역 주택재개발 정비사업 주변 교통안전시설물 설치공사 (원인자부담공사-노면표시)	비고
공사기간	당 초	2018.05.29..~ 2018.06.30.	공사관리번호 2018-0207-034
	변 경	2018.05.29.~ 2018.07.31.
연기사유		주택재개발 주변 교량 전면포장 등에 따른 추가작업으로 인한 공사기간 연장

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	민병훈		도로보수과장	07/03 이상호
협조자
시행	도로보수과-2561	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)