문서번호	공원녹지과-8573
결재일자	2018.7.3.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		조경팀장		공원녹지과장		도시관리국장
박준성		차윤정		신재원		07/03 문인식
협조

★ ◉

『성수동 수제화거리 도시경관사업(조경공사)』

설계변경(정산) 계획보고

성   동   구

『성수동 수제화거리 도시경관사업』설계변경(정산) 계획 보고

「성수동 수제화거리 도시경관사업」조경공사 시행 중 공사내용 변경으로 인한 사업의 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자함

Ⅰ		사 업 개 요

❏ 공 사 명: 성수동 수제화거리 도시경관사업(조경공사)

❏ 위    치: 성수이로(성수역~뚝섬로)

❏ 공사기간: 2018. 12. 15. ∼ 9. 30.

❏ 총공사비: 53,367천원(도급비 25,000천원/관급비 28,367천원)

❏ 공사내용: 수목보호판 및 틀 설치, 수목제거, 뿌리정비 등

❏ 도급업체: ㈜단풍나무 대표 최숙자

Ⅱ		설 계 변 경 내 용

공 종	변경사유	변경내용	금액변동(천원) - 순공사비 -
토 공	▶ 횡단보도신설로 인한 지장수목 및 실제 수목제거 수량반영	▷ 수목제거(R50) 10주 → 18주	증 3,374
	소계		증 3,374
구조물공	▶ 현장여건 변동으로 인한 실 수량 반영	▷수목포호판 설치 99개소 → 90개소 ▷ 수목보호판․틀 설치: 25조→ 30조	감 230
	소계		감 230
부대공	▶ 횡단보도신설로 가로수 식재 어려움	▷ 왕벚나무식재 : 4주→0주	감 2,061
	▶ 가로수 뿌리로 인한 보도블럭 융기정비는 타지자체 일위대가를 참고하여 뿌리돌림품의 20% 반영	▷ 뿌리정비 : 101주→0주 ▷ 융기정비 : 0주→87주	증 3,930
	▶ 성수동2가 331-177 주차장 담장 변경으로 식재 불가	▷ 산철쭉 : 200주→0주 ▷ 담쟁이덩굴 : 25주→0주	감 944
	소계		증 925
관급 자재	▶ 현장여건 변동으로 인한 실 수량 반영	▷ 수목보호판․틀: 99EA→ 90EA	감 2,578
	소계		감 2,578
제경비	▶ 미가입 보험료 등 정산	▷ 건강보험료 등 6종 정산	감 978
	소계		감 978

Ⅲ		공사비 변경

❏ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 감
총공사비	53,367,360	57,061,510		3,694,150
도 급 비	25,000,000	31,273,000		6,273,000
관급자재	28,367,360	25,788,510		-2,578,850

❏ 예산과목:

- 토목과, 지방도건설 및 확대포장, 도로건설사업, 성수동 수제화거리 및

상원길 도시경관사업, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		보고자 의견

❏ 상기와 같이 발생한 변경사항에 대해 설계변경(정산)처리코자 함

붙  임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.