문서번호	시설보수과-3505
결재일자	2018.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	07/03 이성재
협조

『도봉천외 4개 하천 차집관로 정밀조사 용역』

실정보고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.07.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『도봉천외 4개 하천 차집관로 정밀조사 용역』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『도봉천외 4개 하천 차집관로 정밀조사 용역』의 도급자로 부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

1		용역개요

□ 용 역 명 : 도봉천외 4개 하천 차집관로 정밀조사 용역

□ 용역기간 : ‘18.04.18 ~ ’18.09.30

□ 용 역 비 : 136,950천원

□ 도 급 자 : ㈜한국지중정보 대표 양재영

□ 용역내용 : 차집관로 정밀조사 19,538m(자주식 11,604m, 부유식 7,934m)

2		실정보고 내용

□ 수위 만수 및 맨홀이 매몰되어 조사불가 구간발생(1,756m)

3		검토결과

□ 현장조사결과 만수 및 맨홀이 매몰되어 CCTV 촬영이 불가한 사항으로 제외      (1,756m, 24,950천원 감액)

4		조치의견

□ CCTV 촬영이 불가한 구간은 제외하고 감액되는 금액을 활용하여 도급자로 하여금      면목천 및 뚝도노선을 추가조사토록 하고 추후 설계변경에 반영 정산 처리       코자 함.

붙임 : 관련문서 1부.    끝.