투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰[수도권매립지 반입불가 폐기물(가연성) 위탁처리 용역]

1. 환경과-2679(2018.7.2.)호와 관련입니다.

2.『수도권매립지 반입불가 폐기물(가연성) 위탁처리용역』설계변경 계약의뢰하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 수도권매립지 반입불가 폐기물(가연성) 위탁처리용역

나. 계약업체 : ***************

다. 계약기간 : 2018.1.8. ~ 2018.12.31

라. 변경사유 : 폐기물 물량 감소(설계변경 방침서 참조)

마. 변경내역

구 분		당초계약	변경계약	증·감	비 고
계약물량(톤)		3,600	2,600	감) 1,000
계약 금액	계(원)	522,000,000	377,000,000	감)145,000,000	일반회계
	공급가액(원)	522,000,000	377,000,000	감)145,000,000	일반회계
	부가가치세	면 제	면 제	면 제

바. 예산과목

- 일반회계 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 둔치 및 화장실 청소

사무관리비(100-201-01)

붙임 : 1. 수도권매립지 반입불가폐기물 긴급처리 계획 1부.

2. 과업지시서 및 변경산출내역서 각 1부.  끝.

	운영부장
주무관	전응재		주무관	代채영옥		운영부장	07/03 안중호
협조자	총무과장	박병현
시행	환경과-2695	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 .	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0788	/전송	02-3780-0791	/	jtoj777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)