위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)	수도권본부 수도권사업단
제목	“삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사(수서정거장)” 도로점용공사장 교통소통대책 변경 승인 요청 회신

1. 수도권사업단11143(2018.06.27.)호 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가 협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용공사장 교통소통대책 공사기간 변경사항

지 점

변 경 내 용

변경 사유

수서역교차로

·7단계 수서역교차로 남측 유턴지점 위치 변경

·단계별 공사일정 변경

단 계	변경전	변경후
6	2018.5.11.∼2018.6.5	2018.5.11.∼2018.6.30
7	2018.6.6.∼2018.7.4	2018.7.1.∼2018.8.10
8	2018.7.5.∼2018.7.20	2018.8.11.∼2018.9.20
9	2018.7.21.∼2018.8.20	2018.9.21.∼2018.10.9
10	2018.8.21.∼2018.8.31	2018.10.10.∼2018.10.20
11	2018.9.1.∼2018.9.13	2018.10.21.∼2018.11.4
12	2018.9.14.∼2018.10.13	2018.11.5.∼2018.12.2
13	2018.10.14.∼2018.11.30	2018.12.3.∼2018.12.26
14	2018.12.11.∼2019.1.10	2018.12.27.∼2019.1.30
15	2019.1.11.∼2019.2.5	2019.1.31.∼2019.2.28
16	2019.2.6.∼2019.12.21	2019.3.8.∼2019.12.21

·지역난방배관공사 공사구역 확정에 따른 변경

나. 교통소통대책 변경 조건

① 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제6조에 따라 교통소통대책 변경 및 이행 불가능이 예견될 경우, 우리부서로 반드시 제출하기 바람

② 도로점용공사 관련하여 교통안전을 확보할 수 있도록 보행도우미를 배치하기 바라며, 현장 모니터링을 적극 실시하기 바람

③ 단계별 도로점용 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치

④ 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지, 공사시 통제수 배치 및 공사 완료후 통보

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백바름		교통운영팀장	최진경		교통운영과장	07/04 강진동
협조자
시행	교통운영과-11069	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2466	/전송		/	pblqw6293@seoul.go.kr	/	대시민공개