투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행(1회) 및 계약의뢰-한강준설(저수로, 취수장) 정비공사

우리 본부에서 시행중인 『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사

나. 계약기간 : 2018.03.20 ∼ 2018.11.03

다. 도 급 액 : 3,325,433,000원

라. 시 공 사 : 관악산업(주) 주식회사

마. 감 리 사 : 주식회사 정엔지니어링

바. 변경내용                                                  (단위:원)

구 분	1회			비고
	당 초	변 경	증·감
도급비	3,325,433,000	3,325,433,000	-

사. 설계변경사유

- 여의하류 선박 수심부족에 따른 관련부서 준설요청(공원사업과)

- 저수로 및 취수장 시공계획 측량 결과에 따른 구역별 준설물량 증.감

아. 예산과목

- 한강공원관리및운영,한강하천시설관리,한강저수로정비,시설비(시비)

- 깨끗한물관리,한강수질개선,잠실상수원퇴적물준설,시설비(기금)

첨부 :  1. 방침서(설계변경)

2. 건설사업관리자 검토 의견서 1부

3. 설계변경 도서 1부. 끝.

	치수과장
주무관	김동식		치수과장	07/04 신용철
협조자
시행	치수과-2366	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개