문서번호	정수과-5691
결재일자	2018.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이병옥		하은경	07/04 代하은경
협조
	주무관		변민용

사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역 설계변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역 설계변경 계획

2016년 6월부터 시행중인 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(장기계속계약)과 관련하여 계약종료 및 물량변동에 따른 변경계약을 추진하여 계약관리에 만전을 기하고자 함.

계약현황

건  명 : 암사사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(장기계속계약)

도급자

- 처리업체 : 한일시멘트(주)   대표 곽 의 영

- 운반업체 : 승기환경(주)     대표 곽 현 섭

총용역 계약기간 : 2016. 6. 01 - 2018. 06. 30

총용역 부기금액(운반비+처리비) : ￦2,694,502,880원(64,666톤)

설계변경 내역

차수별 물량 및 금액내역서

구 분		변경 전 물량(톤)	변경 후 물량(톤)	변경 전 금액(원)	변경 후 금액(원)	비 고
총용역부기금액		64,666	63,992 (감674)	2,694,502,880	2,666,418,640 (감28,084,240)
차수별	1차(2016)	16,666	16,666 (변동없음)	694,438,880	694,438,880 (변동없음)
	2차(2017)	30,133	30,133 (변동없음)	1,255,581,840	1,255,581,840 (변동없음)
	3차(2018)	17,867	17,193 (감674)	744,482,160	716,397,920 (감28,084,240)	금차

향후 계획

변경계약의뢰(행정관리과) : 2018. 7. 4

준공검사 : 2018.7.14. 이내

붙임 : 1) 합의서 1부.

2) 변경 설계서 1부.  끝.