문서번호	도시철도설비부-6385
결재일자	2018.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	07/05 구자훈
협 조
	신호과장		구봉서

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고

2018. 7. 4(수)

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고

국토교통부(철도시설안전과-1737호,´18. 6.26.), 한국교통안전공단

(철도기술처-1194호,´18. 6.26) 및 철도종합시험운행 시행 지침에 의거 9호선

3단계 시설물검증시험을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

❍ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제 13조

❍ 시험기간 : ´18. 6.27. ~ ´18. 7.27(23일간) ※(토.일 제외)

❍ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주) 3단계 개통 준비단]

❍ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[시설물검증시험 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

❍ 시설물검증시험 내용

계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
97	4	5	12	66	10

※ 시험항목은 국토부 철도종합시험운행 시행지침 [별표 2] 시설물검증시험

점검 항목을 준용.

❍ 추진일정

시설물검증시험		시험결과 검토		시정명령통보
´18.6.27~7.27	⇨	´18.7.30~8. 3	⇨	´18. 8. 3	⇨
서울시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전 개시
´18. 8. 6	⇨	´18. 8. 7	⇨	´18.8.10~9.30
서울시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시험 결과

❍ 시운전 일시 : ´18. 7. 4(수) 09:57 ~ 16:27

- 급전(09:12)   - 단전(16:41)

❍ 시설물검증 시험항목 추진 실적

구 분	계	선로	전철전력	신호	관제
					TTC	SCADA
계획	97	4	5	12	66	10
실적	16	4	1	5	6	-

❍ 금일 시험결과

- 송변전 1개 항목 시험완료(결과 1주일 소요)

- 신호(정위치 정차, PSD 시스템시험은 종료시까지 계속 추진)

- 통신 1개항목 시험결과 이상없음

- 관제신호 2개항목 시험결과 이상없음(야간시험).

❍ 시험내용

- 송변전(변전소 유도장애시험)

↳ 차량에 전력을 공급하는 전철전력(변전소) 설비 운영에 따른 전자기 유도

간섭을 측정하는 시험임.

- 신호(정위치 정차시험)→ 시설물검증종료시까지 계속 추진

↳ 각 역의 정위치 정차 지점에서 정확하게 정차하는지 확인하는 시험임.

- 지상 ATC(자동열차제어장치) 절체시 다음 정거장에서 정위치정차 하는지 확인.

- 신호(PSD 시스템시험)→ 시설물검증종료시까지 계속 추진

↳ PSD가 개방설정과 차량길이에 따라 적절히 개방되는지 확인하는 시험.

- 통신(관제전화설비 시험)

↳ · 관제전화설비에 대한 해당 설비의 기능, 성능, 동작특성, 품질 등 동작

상태 전반에 대하여 확인하는 시험임

- 관제(신호) : 시스템 제어시험(야간)

↳ · 열차 운행시 열차제어컴퓨터(TCC)의 정상동작 여부 및 시스템 제어

사항을 점검하기 위한 시험임

- 관제(신호) : 열차운행 제어상태 확인시험(야간)

↳ · 열차 운행 시 열차운행 제어 상태의 정상 동작 여부를 점검하는 시험임.

❍ 투입(탑승)인원 : (수요일) 22명 / (누계) 88명

투입일	서울시	철도운영자	감리 및 시공사	교통안전공단
18. 7.4(수)	5명	2명	13명	0

❍ 투입차량

투입일	투입편성수	주 박	기관사	운행횟수	정위치정차
18. 7.4(수)	6량 1편성 (9039)	931역 하선 본선	2명

Ⅲ		익 일 계 획

❍ 시운전일시

- 주 간 : ´18. 7. 5(목) 09:30 ~ 17:00

❍ 시험 항목

- 전차선 1개 항목 시험

- 신호 1개 항목 시험

- 통신 1개 항목 시험

❍ 시험내용

- 전차선(전차선 비디오 모니터링 시험)

↳ · 전차선과 차량 집전장치의 원활한 습동여부 및 집전상태를 카메라

등 녹화장치를 통해 촬영 후 확인하고, 전차선의 적정 설치여부 등을

육안으로 확인하는 시험을

- 열차의 운행상태(증속단계별로 또는 최고 운영속도)에서 집전장치와

전차선 간의 이선이 없으며, 아크 발생이 적고, 집전이 원활해야 함.

- 신호(Global Test 시험)

↳ · 전 구간을 ATC 시스템의 감시 상태에서 허용된 최대 속도로 운행할 때,

각 섹션 INVARIANT(고정값) 및 VARIANT(변환값) 전송 구분이 열차

운행에 방해가 되지 않는지를 확인.

- 전 구간을 최대 속도로 주행 시, 열차가 연속 전송 신호를 정상적으로    수신하는지 확인.

- 최대 속도로 주행하는 상태에서 모든 비콘을 검지하고 보정하는지 확인

- 통신(통합교환설비)

↳ · 통합교환설비에 대한 해당 설비의 기능, 성능, 동작특성, 품질 등 동작

상태 전반에 대하여 시설물 검증을 목적으로 한다.

- 가입자간 내선 및 국선 착·발신을 하여 정상적으로 통화상태가

이루어지는지 확인한다.

- 관제조작반에서 주요 장비의 기능상태를 확인한다.

- 관제조작반의 EVENT 이력에 해당 장애의 ALARM이 표시되는지 확인

❍ 시험열차 투입

- 주 간 : 6량 1편성(2단계 열차 및 기관사)

❍ 투입(탑승)인원

- 주 간 : 서울시 1명, 철도운영자 2명, 기관사 2명, 감리 및

시공사 등 6명

붙 임 1. 시설물검증시험일지(신호) 7부 .

2. 시설물검증시험일지(통신) 1부 .

3. 시설물검증시험일지(송변전) 3부 .

4. 시설물검증시험 결과 현황 1부.

5.  시설물검증시험 일정표 1부.  끝.