투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	923공구 전면책임감리용역 계약금액 변경 의뢰(총괄10회 및 8차2회)

우리 본부에서 시행 중인『서울지하철 9호선 3단계 923공구 전면책임감리용역』총괄10회 및 8차2회 계약변경(소방․전기분야 감리원 추가 투입)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울 지하철 9호선 3단계 923공구 전면책임감리용역

나. 용역기간 : 2010.8.5. ~ 2018.12.31.(8차 : 2017.8.26. ~ 2018.12.31.)

다. 계약금액 : 5,019,689천원(8차 : 980,716천원)

라. 도 급 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 대표이사 신완수 외 3개사

마. 총괄10회 및 8차2회 계약변경 현황                        (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총괄 10회	계약금액	5,019,689	5,078,793	증)59,104
	공사기간	2010. 8. 5. ~2018.12.31.	2010. 8. 5. ~2018.12.31.	변경없음
8차 2회	계약금액	980,716	1,039,820	증)59,104
	공사기간	2017. 8.26. ~2018.12.31.	2017. 8.26. ~2018.12.31.	변경없음

- 변경사유

2018년 현재 종합시운전, 시설물 검증시험 중에 있으며, 업무협의 및 조율 등을 위하여 전기(상주)․소방(비상주) 감리원 배치 기간연장이 필요함.

바. 예산과목

- 재정사업 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 감리비

붙 임 1) 검토보고서 1부.

2) 총괄 10회 및 8차2회 변경내역서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	정삼기		토목3과장	호경수		도시철도토목부장	07/05 이도헌
협조자	대금시스템과장	박환		기획예산과장	안순봉
시행	도시철도토목부-8107	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)	/
전화	02-772-7238	/전송	02-772-7306	/	junsamgi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)