문서번호	배수과-5386
결재일자	2018.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		배수과장
박종혁		07/06 이용구
협 조
	주무관		권오정

노후송배수관 정비공사 추진실적보고(6월)

2018.  7.

급  수  부

[배수과]

노후송배수관 정비공사 추진실적 보고(6월)

2018년도 노후 송배수관 정비공사 월별 추진실적을 점검하여 공정관리 등 사업추진이 원활이 진행될 수 있도록 추진하고자 함.

□ 현   황

○ 정비목표 : 25km

○ 사 업 비 : 59,381백만원

○ 발주건수 : 24건

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부1)	기타2)
발주대상(건수)	24	4	1	3	3	3	3	5	2
정비계획(㎞)	25	4.7	1.0	4.0	1.7	2.2	3.3	5.8	2.3
사업비 (백만원)	59,381	9,720	2,200	5,450	3,100	5,700	9,300	11,000	5,900	1,360	5,651

※ 본부 1,360백만원 : 대행사업비-1,360백만원, 시설부대비-10백만원

※ 기타 5,651백만원 : 대형 상수도관 진단 2,000백만원, 송배수관 관로 설계비 2,300백만원, 예비비 1,351백만원

□ 추진실적

○ 6월말 현재 정비실적 : 6.7㎞

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	25	4.7	1.0	4.0	1.7	2.2	3.3	5.8	2.3
전월실적	4.3	2.3	0	0	0	0	1.0	1.0	0
당월실적	2.4	0.4	0	0	0.3	0.1	0.8	0.8	0
실적누계	6.7	2.7	0	0	0.3	0.1	1.8	1.8	0
정비율(%)	26.8	57.4	0	0	17.6	4.5	54.5	31.0	0

※ ‘17년 사고이월공사 추진실적(2.7km) 포함

□ 향후계획

○ 교통소통대책수립 용역 및 굴착허가 지연 등의 사유로 착공시기는 다소 부진하였으나 전체 공정 이상없이 추진중 임.

○ 매월 사업 추진실적을 점검하여 목표달성에 차질이 없도록 지속적인 모니터링 시행.  끝.