문서번호	설비부-9458
결재일자	2018.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	07/06 권오식
협조
	대금시스템과장		박환

『남부도로사업소 청사 신축 공사』

전기분야 관급자재 구매계획 보고

2018. 7.

『남부도로사업소 청사 신축 공사』

전기분야 관급자재 구매계획 보고

남부도로사업소 청사 신축 전기공사의 관급자재 구매계획을 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 남부도로사업소 청사 신축 전기 공사

○ 공사기간 : ’17.11.09. ~ ’19.05.08.(1차  ’17.11.09. ~ ’18.08.31.)

○ 도 급 비 : 1,028,152,705원(1차 41,000,000원)

○ 공사내용 : 수배전(저압2회선, 업무시설 365kW, 주민편의시설 195kW)설비,

발전(태양광 50.4kW, 비상 200kW)설비 및 소방설비 1식

○ 시 공 사 : ㈜성제전기 대표자 김팔성

○ 공 정 율 : 0%(※ 건축공정율 15%)

○ 감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소(건설사업관리책임기술자 한광섭)

2		관련근거

○ 감리사 삼우(도시기반) 제18-0628호, 전기공사 관급자재 구매 요청

3		보고내용

○ 전기공사 관급자재 구매(※ 상세내역 붙임문서 참조)

품 명	단위	수량	금액(천원)	구매방법	법 적 근 거	설 치 구 분
배전반 및 제어반 제작 구매	식	1	194,042	총액수의	조달사업법 제9조의 2(우수조달물품등의지정)	관급자
분전반 및 제어반 제작 구매	식	1	119,103	총액수의	조달사업법 제9조의 2(우수조달물품등의지정)	관급자
조명 및 전력 제어시스템 구매	식	1	214,933	총액수의	조달사업법 제9조의 2(우수조달물품등의지정)	관급자
발전기, UPS, 조명설비 구매 등	식	1	343,192	3자단가	동법시행령 제9조의 3 (계약체결의 요청등)	도급자
합 계			871,270		(부가세 및 수수료 포함)

○ 소요예산 : 871,270,150원(자재비 864,520,780원, 수수료 6,749,370원)

○ 보고자 의견

상기 내용을 검토한 결과, 관련 법령에 적합하여 공사일정을 고려한 시공자와 관급납품자           간 원활한 업무협의가 이루어질 수 있도록 조기 발주함이 타당하다 사료됨

4		조치계획

○ 서울시 일상감사규정에 의거 해당 물품은 일상감사 후 계약의뢰(총액수의)하고, 비대상          물품에 대해서는 건설총괄부에 바로 계약의뢰(3자단가)하고자 함.

붙임  1. 감리보고서(관급자재 구매요청) 1부.

2. 관급자재 내역서 1부.  끝.