문서번호	교통운영과-11341
결재일자	2018.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		교통안전팀장		교통운영과장
손태빈		김세교		07/09 강진동
협 조

무단횡단 금지시설 설치 구간 변경 보고

2018. 7

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

무단횡단 금지시설 설치 구간 변경 보고

2018년 보행자 횡단 사고를 줄이기 위하여 서울지방경찰청과 협의하여 구간을 선정하였으나 현장 상황에 따라 설치가 어려운 구간이 있어 이에 대한 검토 보고임

□ 관련근거

○ 교통운영과-6647(‘18.4.19) : 무단횡단 금지시설 설치 예산 재배정 계획보고

○ 종로경찰서 교통과-3126(‘18.6.1) : 간이중앙분리대 설치 장소 변경 협조 요청

○ 관악경찰서 교통과-4151(‘18.6.5) : 교통안전시설 설치 협조 재요청

○ 남부도로사업소 도로보수과-3108(‘18.6.21) : 무단횡단 금지시설 설치구간 변경 검토 요청

□ 문 제 점

○ 북부도로사업소 구간(종로서)

- 안국교차로~조계사교차로 : 조계사 연등회 구간으로 행사 진행에 지장

○ 남부도로상버소 구간(관악서)

- 관악보건분소~신림2교 : 차로폭 협소로 시설물 설치를 위한 차로조정 불가

- 은천초등학교 앞 : 미끄럼방지시설 설치구간으로 차로 조정을 위한 추가예산 반영이 어려움(미끄럼방지 재설치 비용 90백만원)

□ 설치 구간 변경 검토

○ 위와 같이 현장 상황에 설치 구간 변경이 불가피한 지점에 대하여 관할 경찰서의 자료를 참고하여 인근 보행사고 다발지역에 설치 가능

- 북부도로사업소 구간(종로구-종로경찰서)

당 초	변 경	비 고
안국교차로~조계사교차로 (300m)	구기동삼거리~서서울농협(200m) 화정박물관~평창파출소(100m)	종로경찰서 변경 설치 요청구간

- 남부도로사업소 구간(관악구-관악경찰서)

당 초	변 경	비 고
관악보건분소~신림2교(500m)	봉천로사거리~은천삼거리(280m)	관악경찰서 설치 요청구간 중 당초 계획과 가까운 지점
은천초등학교 앞(200m)	국사봉터널~구암초교(200m)

□ 조치계획

○ 위 검토결과를 사업시행 부서에 통보하여 무단횡단 금지시설 설치에 만전을 기하고자 하며,

○ 시설물 설치 연장 조정에 따른 변경 예산은 차로 조정에 따른 노면표시 공사 등에 활용(예산 재배정 변경 없음)

붙  임 : 도로사업소(북부·남부) 설치구간 목록 각1부.  끝.