위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	노원구청장(장애인지원과장)
(경유)
제목	2018년 장애인복지관 기능보강사업 변경 승인

1. 노원구 장애인지원과-13690(2018.7.9.)호와 관련입니다.

2. 2018년도 장애인복지관 기능보강사업 변경 승인 요청사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 당해 사업이『지방계약법』및『서울특별시 지방보조금 관리 조례』등 관련 규정에 의거 조속히 집행될 수 있도록 지도 · 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 시립장애인복지관 보도환경 개선사업

나. 사업비 : 200,000천원 (시비 140,000천원/ 구비 60,000천원)

다. 변경승인 요청 내역

세부내역	변경 전	변경 후	변경사유
주 진입보도 정비	아스콘 재질로 전면 교체	보도평탄화 작업, 파손된 보도 교체	공사 시행부서 및 시행업체의 현장 실사 결과 보도를 교체 하기보다는 파손된 부분만 교체하고, 보도가 고르지 않은 곳은 평탄화작업을 하는 것이 좀 더 효율적임
험프형 횡단보도 설치 (차도와 보도 단차줄임 공사)	-	실시	주 진입보도의 폭이 좁아 (2m) 횡단보도 인근에서 보도가 갑자기 기울어짐. 이곳에서 전도사고가 종종 발생하여 차도와 보도의 단차를 없애기 위해 험프형 횡단보도 설치가 필요함
덕릉로(대로)방면 보도교체, 자전거도로 재포장	-	실시	시립장애인복지관으로 진입할 수 있는 대체보도로서 파손된 구간이 많아 재포장을 하여 장애인들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하고자 함
마들체육공원 내 안내표지판	-	설치	대체보도에서 마들체육공원을 통해 시립장애인복지관으로 진입하는 구간에 장애인들이 쉽게 복지관을 찾아가실 수 있도록 안내표지판을 설치 하고자 함
마들체육공원 진입로 정비(직각→라운드)	-	실시	주진입보도의 폭이 좁아(2m) 전동휠체어간 교행이 어려우므로 주진입보도에 있는 마들체육공원 진입로를 전동휠체어가 교행이 가능하도록 직각에서 라운드형으로 넓혀 쉽게 교행하실 수 있도록 하고자 함
주 진입보도 안전난간 설치	실시	실시	기존안대로 공사시행
상이군경복지관 후면 가각정리	실시	실시	기존안대로 공사시행

< 요청사유 >

-　사업비 투입이 많은 보도교체공사(550m 구간, 전체 사업비 200,000천원 중  80,000천원 소요)관련 부서 현장실사 검토결과, 보도교체보다는　 보도 평탄화 작업 및 파손된 보도교체가 효율적이라는 판단을 하였음

-  여분의 사업비를 좀 더 안전하고 편리한 보도환경 조성을 위한 용도로          사용하고자 함

- 총액 변동 없음

라. 검토결과 : 승인

마. 승인사유

- 장애인에게 좀 더 안전하고 편리한 보도환경을 조성하고자 주 진입보도 평탄화 작업, 험프형 횡단보도 설치, 자전거도로 재포장, 진입로 재정비, 안내표지판 설치 등 사업비 총액 변동없이 세부사업을 변경 요청한 사항으로서 변경승인이 필요하다고 판단됨.  끝.

	서 울 특 별 시 장
실무사무관	한서경		장애인재가복지팀장	경자인		장애인자립지원과장	07/09 안찬율
협조자
시행	장애인자립지원과-12584	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 1층 장애인자립지원관	/
전화	02-2133-7461	/전송	02-2133-0839	/	hanse0234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)