＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	2018년도 도로굴착사업 시공계획서 제출(이수교차로~서초소방서간)

1. 도로보수과-1911(2018.4.16.)호, 시설관리과-7094(2018.4.19.)호 및 도로보수과       -3228(2018.6.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련으로 기 사전협의 회신한 이수교차로~서초소방서간 외 1개소 송배수     관정비공사구간에 대해 현재 공정율 37.3% 추진 중에 있으므로 귀 소에서 계획중     인 포장공사 일정을 상수도공사 완료후로 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도공사 현황

1) 공 사 명 : 이수교차로~서초소방서간 외 1개소 송배수관정비공사

2) 공사구간 : 반포동 114-5 ~ 방배동 750-20

3) 공사개요 : D=700~500mm,  L= 850m(야간공사)

4) 공사기간 : 2018. 4. 27. ~ 2018. 10. 23.

5) 도로포장 연기사유 : 대규모 수질사고 예방을 위한 노후상수도관 교체공사로써 현                               재 상수도공사 진행중으로 상수도공사 완료 후 포장시행

붙임 : 시공계획서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	강희창		시설관리과장	전결 07/09 代정연준
협조자
시행	시설관리과-11907	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)