투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	2018년 서울대공원 등산로 정비공사 준공기한 연기 시행

1. 조경과-3906(2018.7.9.)호와 관련입니다

2. 우리과에서 시행중인 ‘2018년 서울대공원 등산로 정비공사’와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 서울대공원 등산로 정비공사

나. 위    치 : 서울대공원 산림욕장 길

다. 공사내용 : 데크계단 2개소, 목교 1개소, 방향안내판 정비 14개소, 방향안내판 신설 1개소, 매트포장 950m 등

라. 공사기간 : 2018. 5. 24 ~ 7. 12

마. 도 급 액 : *************

바. 도급업체 : *************

사. 준공기한 연기

- 당초 : 2018. 5. 24 ~ 7. 12

- 변경 : 2018. 5. 24 ~ 7. 31(19일 연장)

아. 연기사유 : 붙임 참조

붙임 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 1부. 끝.

	조경과장
주무관	최수영		조경과장	07/09 강인호
협조자
시행	조경과-3931	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7540	/전송	02-500-7993	/	csy0119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)