투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	「2018 노후조경시설물 교체 및 정비사업」설계변경(2차) 시행

1. 조경과-3955(2018.7.10.)호와 관련입니다.

2.「2018 노후조경시설물 교체 및 정비사업」에 관련하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

1) 공 사 명 : 2018 노후조경시설물 교체 및 정비사업

2) 공사개요 : 동물원내 시설물 정비 등

3) 공사기간 : 2018. 5. 16 ~ 7. 14

4) 계 약 자 : (주)가우조경 대표 박인성

나. 설계변경 사유 및 내용

1) 변경사유 : 제경비(환경보전비) 정산

2) 변경내용

가) 계약금액

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		93,830,000	93,627,000	-203,000
도급비	공급가액	66,447,973	66,263,428	-184,545
	부가가치세	6,644,797	6,626,342	-18,455
	계	73,092,770	72,889,770	-203,000
관급자재비		20,737,230	20,737,230	0

나) 공사기간 : 변동없음

다. 예산과목 : 서울대공원총무과, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 조경시설물설치및정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율검증표. 1부.  끝.

	조경과장
주무관	송미진		주무관	강금완		조경과장	07/10 강인호
협조자
시행	조경과-3962	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7512	/전송	02-500-7993	/	palace80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)