문서번호	한양도성도감-6452
결재일자	2018.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
박민상		곽동진	07/11 진용득
협조

「한양도성 인왕산 탐방로 환경 정비」

공사 기간 연장 계획

2018. 7.

문 화 본 부

(한양도성도감)

「한양도성 인왕산 탐방로 환경 정비」

공사 기간 연장 계획

한양도성 인왕산 탐방로 환경정비 공사 추진 관련 군 초소에 설치된 CCTV 등 군 시설의 이전 일정과 맞추어 공사 기간을 변경(연장)코자 함

공사개요

○ 공 사 명 :「한양도성 인왕산 탐방로 환경 정비 공사」

○ 계약금액 : 금42,505,000원(사천이백오십만오천원정)

○ 계 약 자 : ㈜원택건설 대표 오원진

○ 계약기간 : `18. 6. 18. ~ `18. 7. 17.

‣ 기간연장 : `18. 6. 18. ~ `18. 9. 15.(60일 연장)

연장사유

○ 철거 대상인 시설(초소)에 설치되어있던 기존의 CCTV 및 광케이블 등 군 자체 시설 이전 일정(7월 중순 공사 계약)에 맞추어, 본 공사의 기간 변경(연장)

향후 계획

○ `18. 7월 : 재무과 설계변경(기간연장) 의뢰

○ `18. 9월 : 공사 완료.

붙 임 : 현황사진 1부. 끝.