위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(공사기간 연장)

1. 한양도성도감-6452(2018.7.11.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 ‘한양도성 인왕산 탐방로 환경정비 공사’ 의 공사 기간을 다음과 같이 연장하고자하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 한양도성 인왕산 탐방로 환경 정비 공사

- 계약업체 : ㈜원택건설(대표 : 오원진)

- 계약금액 : 금42,505,000원(금사천이백오십만오천원정)

나. 변경내용 : 계약기간 연장 (금액변동없음)

- 당 초 : `18. 6. 18. ~ `18. 7. 17.

- 변 경 : `18. 6. 18. ~ `18. 9. 15.(60일 연장)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.

	한양도성도감과장
주무관	박민상		도성관리팀장	곽동진		한양도성도감과장	07/11 진용득
협조자	계약1팀장	조현
시행	한양도성도감-6464	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2661	/전송	02-2133-1063	/		/	부분공개(2 6)