문서번호	시설개선과-5726
결재일자	2018.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호		정경수	07/11 박영준
협 조
	주무관			윤승근

- 효창운동장 관람석 개선 및 바닥정비공사 -

공정 및 물량변경에 따른 계약금액 조정 검토보고(1회)

2018. 7

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 효창운동장 관람석 개선 및 바닥정비공사 -

공정 및 물량변경에 따른 계약금액 조정 검토보고(1회)

『효창운동장 관람석 개선 및 바닥정비공사』와 관련 공사 물량 및 공정 변경과 시공사 실정보고 사항에 대한 계약금액 조정 검토보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 효창운동장 관람석 개선 및 바닥정비공사

○ 공사개요

- 관람석 철거 11,200석, 바닥재 시공 7,843㎡, 논슬립 시공 1,244㎡, 합성목재 데크설치 4,445m, 안전난간 신설 718m 등

- 관급자재(합성목재) 3,250㎡

○ 사 업 비 : **************

- 도급비 : **************

- 관급비 : ************(합성목재)

○ 공사기간 : 2018. 6.22 ~ 9.19

○ 시 공 사 : ************

○ 추진경위

- 2018.  05. 10    발주방침

- 2018.  05. 24    공사발주

- 2018.  06. 22    공사계약 및 착공

- 2018.  09. 19    준공예정

계약금액 조정 추진근거

○ 효창운동장 관람석 개선 및 바닥정비공사 발주방침(시설개선과-3843호(2018.05.10))

- 발주시 예산부족으로 공사 미반영 구간은 전국체전예산 집행잔액을 활용하여 물량 변경계약

▶ 공사 C구간 합성목재 데크시공 및 관급자재(합성목재) 추가 구매

▶ 석축구간 안전난간 추가시공 등

○ 효창운동장 관람석 A, B 통행로 안전지지대 설치건의(경영지원팀 2018-6-15호(2018.06.28))

- 서울시축구협회측에서 본부석 스탠드 계단통로에 대한 안전난간 설치요청

▶ 본부석 A, B 계단통행로 경사도가 높아 입주단체 및 경기관람객(노약자 등)들에게 통행불편을 주고 있어 안전난간 4개소 신설요청

보고내용

○ 물량 및 공정 변경사항

- 공사 C구간 합성목재 테크 시공 및 관급자재 추가 수량반영

사유) 발주 당시 예산부족으로 반영하지 못한 C구간 합성목재 시공 및 자재에 대한 추가 수량 반영 W760 408m, W610 1,334m 등 추가시공 및 자재 반영(**********)

- 석축구간 안전난간 추가 수량반영

사유) 발주 당시 예산부족으로 반영하지 못한 석축 구간과 서울시축구협회측 요구사항에 대한 안전난간 추가시공 난간설치(H=1200) 18m, 안전난간B(H=1540) 138m 추가시공(*********)

- 관람석 통로구간 문양만들기 공정 반영

사유) 관람석 통로구간의 미관고려와 안전사고를 예방코자 문양만들기 1,156㎡ 공정 추가반영(*********)

○ 시공사 실정 보고사항

- 스탠드 바닥재 시공물량 변경

사유) 계약 설계서상 미반영된 계단 옆면과 3층 계단 바닥재 시공물량 249㎡ 반영(*********)

계단 옆면	3층 계단

- 몰탈 타설 공정 및 수량 변경

사유) 스탠드 하단 통로 구간의 구배가 불량하여 물고임 현상 발생, 계약 설계서상 몰탈 5mm 시공으로는 물구배 잡기가 어려워 몰탈 10mm로 시공변경과 계단옆면 및 3층 계단 물량증가. 몰탈 타설(5mm) 133㎡을 감하고, 몰탈 타설(10mm) 382㎡로 변경(*********)

스탠드 하단 통로	통로 배수불량

- 운동장 트랙 보양, 관람석 하지철물 고재처리, 관람석 일부 재활용품 처리

사유) 철거 관람석 반출 시 운동장 우레탄 트랙 보양작업, 관람석 하지 철물 고재처리, 일부 관람석 재활용품 처리 등 신공정 발생 및 수량변경. 보양작업 600㎡, 고재처리 11.2톤, 재활용 플라스틱 11.2톤 등(********)

- 제경비(각종 보험료 등) 정산(*********)

계약금액 조정

○ 총공사비 증․감 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		*************	*************	************
도급액	공 급 가 액	*************	*************	************
	부가 가치세	***********	***********	************
	계	*************	*************	************
관급자재비		***********	***********	************

○ 예산조치

- 사업예산 : **************

- 집행잔액 : ************

- 계약금액 조정으로 늘어나는 ************은 본사업 집행잔액(************)과 전국체전사업 집행잔액 일부(***********)를 사용코자 함.

조치의견

○ 위와 같이 공정 및 물량변경 계약으로 공사를 추진, 2019년 제100회 전국체전 대비와 시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함.

덧붙임  1. 시공사 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서. 1부.

3. 구단측 추가공사 요청공문 1부.  끝.