문서번호	설비부-9583
결재일자	2018.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	07/11 권오식
협조
	대금시스템과장		박환

『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 공사(장기계속)』

전기공사 1차수 준공정산 보고

2018. 07.

『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 공사(장기계속)』

전기공사 1차수 준공정산 보고

「여의교 확장 전기공사」 중 차도 확장구간의 신규 가로등 설치 방법

변경에 따른 1차수 이설물량에 대한 준공정산 보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사

○ 공사기간 : ’17.03.02. ~ ’18.11.29.(1차, ’17.03.02.~’18.06.30.)

○ 도 급 비 : 금353,459,380원(1차 금113,356,000원)

○ 공사내용 : 가로등 신설 82본, 보도등 설치 264등, 기타전기공사 1식

○ 시 공 사 : 태승전력㈜ 대표자 김태민

○ 공 정 율 : 75%(여의교 확장 공사는 완료)

○ 감 리 사 : ㈜천일(책임건설사업관리기술자 박태선)

2		검토근거

○ 감리사 천일(감리)제18-1308호, 전기공사(1차) 준공검사 결과 보고

3		정산내용

○ 정산 사유

여의교 확장구간(240m)의 기존 가로등(7본) 이설을 배제하고 신규 가로등(9본)           설치 후 기존 가로등을 철거하여 1차수 미시행 이설 물량을 감정산 함

○ 정산 내용(감 조정 내역)

차수	구 분	정 산 내 용	수 량		금 액	비고
			계약	이행
1차수	공사중 가로등 설비이설공사(여의교)	절연비닐케이블 1C, 6㎟	254m	-	596,900	감액
		압착단자, 터미널 6㎜	21개	-	609	감액
		등기구 재사용(이설)	21회	-	788,004	감액
		가로등주(이설)	21회	-	3,228,582	감액
간접비	(제비율 등)				1,846,814	감액
소 계	(공 급 가 액)				6,460,909	감액
	(부가가치세)				646,091	감액
합 계		(이설 물량 감 조정)			7,107,000	감액

○ 1차 준공정산 현황

구 분	계 약 금 액	준 공 금 액	비 고
1 차수	113,356,000원	106,249,000원	감7,107,000원

○ 건설사업관리기술자 종합의견

관련 규정에 의거 준공검사 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 준공되었음

4		조치의견

○ 상기 전기공사1차수의 미시행(예산절감)분에 대해 정산하여 준공하고자 하며,          준공정산된 부분에 대해서는 감하여 총차 변경계약을 건설총괄부에 계약의뢰하고자 함.

붙임  1. 준공검사 결과보고 1부.

2. 1차 준공내역서 1부.

3. 준공합의서(1차) 1부.  끝.