문서번호	도시철도사업부-6641
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	신교통1과장	도시철도사업부장
강창묵	위성환	07/12 박동룡
협 조	신교통2과장		성원배
	주무관		김동일
	주무관		박노성
	주무관		서현준
	주무관		왕태현
	주무관		신익현

별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 주간공정회의 개최 결과 보고(7월2주)

2018. 7.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 별내선(8호선연장)1,2공구 건설공사 -
주간공정회의 개최 결과 보고(7월2주)

별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사의 원활한 공사추진 및 적정 공정관리를 위한 주간공정회의(7월2주)개최 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘18.07.11(수) 14:00~15:00

○ 장    소 : 도시철도사업부 회의실

○ 참 석 자 : 12명

- 본  부 : 도시철도사업부장, 신교통1과장, 신교통2과장, 담당 주무관 5명

- 현  장 : 1·2공구 책임건설사업관리기술자, 1·2공구 현장소장

□ 추진현황 보고

○ 보 고 자 : 1,2공구 책임건설사업관리기술자

○ 보고내용

- 본선구간 지장물 이설 현황, 토공굴착 현황, 정거장구간 복공판 설치 현황(1공구)

- 1․2번 환기구 부지조성공사 및 옹벽시공 현황(2공구)

□ 공정회의 결과

○ 파일 공사 및 수직구 공사 적정 추진 중 (완료/계획)

- 본선 1-1구간 지장물이설 횡줄파기 작업 (48/63m)

- 본선 1-2구간 토공굴착 작업 (765/9,549㎡)

- BN1 정거장 구간 복공판 설치 (2,273/4,638㎡)

- 환기구 1번 부지조성공사 흙깍기 (5,500/23,345㎥), 토사반출 (1,833/15,873㎥)

- 환기구 2번 지중연속벽 장비 및 플랜트 해체, 문형크레인 설치작업

□ 주요 토의내용

○ 도시철도사업부장

- 배면 차수 그라우팅은 시험시공 및 효과확인후 배합비, 주입량과 압력을 관리하여 밀실시공하고, 공사중 용수로 인한 문제 없도록 할 것

- 안전관리 및 주민 불편(복공턱 단부 포장) 철저 관리

- 금년도 및 내년도 공사비 집행 전망 및 예산관리 철저

- 1차공사 준공 및 2차공사 적기 발주

○ 책임건설사업관리기술자/현장소장

- 공정관리, 품질확보, 안전시공을 최우선 목표로 공사추진에 차질이 없도록 공사관리에 만전을 기하겠음.

□ 향후계획

○ 차기 공정회의시 금회 공정회의 요구사항 조치결과 보고

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 공정회의 사진 1부.

3. 공정추진현황 1부.  끝.