위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장
(경유)	이 문서 최종 수신기관의 장은 (서울지역본부장)입니다.
제목	공사계획(변경)신고 수리 통보(154kV 당인리변전소 변압기 교체)

1. 한국전력공사 서울본(변전)-2050(2018.07.10.)호와 관련입니다.

2. 전기사업법 제61조(전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고) 제3항의 규정에 의거, 신고한 전력시설물 공사계획변경신고에 대해 다음과 같이 수리하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 154kV 당인리 변전소 #1,2,3 Tr 교체공사

나. 신 고 인: 한국전력공사 서울지역본부장

다. 공사기간: 2018.04.23.~2018.10.24.(감리원배치확인서)

라. 변경내용: 공사기간 연장

(당초) 2018.04.23.~2018.07.10. (변경) 2018.04.23.~2018.10.24.

마. 공사계획변경신고서 검토결과: 적정

붙임: 1) 공사계획변경신고서 검토서 1부.

2) 공사계획 변경신고필증     1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정춘용		태양광총괄팀장	서수일		녹색에너지과장	07/12 신동호
협조자
시행	녹색에너지과-17706	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문청사 1동 11층)	/
전화	02-2133-3566	/전송	02-2133-1020	/	rokmc459@seoul.go.kr	/	대시민공개