문서번호	설비부-9673
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김현욱	代이호기	07/12 권오식

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

2018. 7.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

「천호대로(광나루역) 확장 공사」상징조형물 설치에 따른 실정보고를 검토 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

천호수 제2018-409호(2018.07.10.), 실정보고(상징조형물 설치공사) 승인 요청

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

공사위치 : 서울시 광진구 구의동 58-15~광장동 388-10

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2018. 12. 20.

공사내용 : 지하차도 조명등 및 가로등 설치공사 1식, 경관개선공사 1식

도 급 비 : (총차)1,399백만원, (7차)682백만원

시 공 사 : ㈜거성전설 대표 공병준

감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

Ⅲ		검토내용

실정보고 사유

□ 상징조형물 설치에 따른 전기공사분 설계변경

주요물량 변경 사항

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
전력케이블	F-CV 1C×50㎟	M	0	242	증)242
피뢰설비	-	식	0	1	증)1
접지설비	-	식	0	1	증)1
전선관	PE 36mm	M	0	30	증)30
UTP케이블	cat.6 0.5㎜	M	0	109	증)109

공사비 변경 사항

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	천원	0	77,000	증)77,000
간접공사비	천원	0	38,236	증)38,236
도 급 비	천원	0	115,236	증)115,236
관 급 비	천원	0	114,342	증)114,342
이 전 비	천원	0	4,483	증)4,483
총 공 사 비	천원	0	234,061	증)234,061

감리단 검토의견

□ 지하차도 상부 상징조형물 설치를 상부 경관개선공사와 연계하여 지역 랜드마크 이미지 형성이 가능한 전망대 기능을 겸한 상징조형물의 설계변경은 적정하다고 사료됨.

Ⅳ		검토의견

책임 건설사업관리기술자가 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고, 증액되는 공사비는 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  실정보고(감리단) 1부.  끝.