문서번호	전시기획과-557
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		전시기획과장	한성백제박물관장
송동림		김영심	07/12 이인숙
협 조
	총무과장			오천석
	유물과학과장			이경자

2018 국제교류전 유물대여 및 운송계획

2018. 7.

2018 국제교류전 유물대여 및 운송계획

2018 국제교류전 전시대상 유물 중 중국 산동박물관 소장품을

대여·운송하여 보관 및 전시하는 데 만전을 기하고자 함.

1		추진개요

○ 전 시 명 : 2018 국제교류전 <동아시아 바닷길과 산동>

○ 기    간 : 2018. 9. 7.(금) ~ 2018. 12. 2.(일)

○ 추진근거 :  ·중국 산동박물관과 한국 한성백제박물관 전시 개최를 위한 협의서

·2018 국제교류전 개최 계획 【전시기획과–제349호 (2018. 4. 6.)】

○ 대여유물 : 82건 137점

연번	대여기관	대여기간	유물수량
1	중국 산동박물관	*****************	********
합 계			********

※ 대여기관 사정에 따라 유물수량 변동 가능

○ 소요예산 : 80,000,000원

2		추진방향

○ 외국기관 소장유물의 안전한 운송 및 보관·관리를 위한 문화재종합보험 가입

○ 국외유물의 안전한 운송을 위한 국제유물운송 전문업체와 계약

- 포장 및 항공운송을 위한 수출입 통관절차 진행

- 육로 이동시 유물운송 전문차량(항온항습·무진동차량) 이용

○ 유물 인수인계 후 전시 개막 전, 전시폐막 이후 반환일까지 수장고 내 임시보관 및 사진촬영 진행

3		추진 일정

날짜	8.12(일)~8.17(금)	8.18(토)	8.19(일)	8.20(월)
위치	중국 산동박물관	중국 산동박물관 → 중국운송업체 수장고(북경)	중국운송업체 수장고(북경) → 북경 서두우공항	북경 서두우공항→ 인천공항→박물관
내용	-유물 상태점검 -운송을 위한 포장 -세관 수속 및 검사	-인수인계서 서명 -유물 이동(육로)	-수출 통관 절차 -공항 반입 운송 -보안검사	-선적 및 항공운송 -수입 통관 절차 -박물관 수장고 임시보관

날짜	12.3(월)~12.6(목)	12.7(금)~12.10(월)	12.11(화)~12.14(금)
위치	한성백제박물관	한성백제박물관 → 인천공항 → 북경 서두우공항 → 중국 산동박물관	중국 산동박물관
내용	-유물 상태점검 -운송을 위한 포장 -인수인계서 서명	-공항 반입 운송(육로) -수출 통관 절차 및 세관검사 -선적 및 항공운송 -수입 통관 절차 -유물 이동(육로)	-유물 해포 및 상태점검 -인수인계서 서명

※대여기관 사정에 따라 운송일정 변동 가능

4		행정사항

○ 소요예산 : 80,000,000원

구 분	금 액	산출내역	예산과목
박물관 및 문화재단 종합보험 가입료	10,000,000원	포장 및 해포 위험을 포함한 운송 및 전시 보관 위험 담보	선사·고대역사문화공간창조/ 박물관운영활성화/백제문화특별전/공공운영비(100-201-02)
대여유물 운송료	70,000,000원	포장 및 해포, 수출입운송(항공) 및 육로운송, 전시장 내 설치작업	선사·고대역사문화공간창조/ 박물관운영활성화/백제문화특별전/사무관리비(100-201-01)
합 계	80,000,000원

○ 협조사항

－ 유물과학과 : 대여유물 수장고 및 임시보관, 촬영장소 협조

－ 총 무 과  : 유물운송 계약 및 보험료 지급, 유물운송 및 유물전시 관련 휴일근무 시 대체휴무제 실시

5		향후계획

○ 2018. 8. 20. ~ 8. 28. : 유물대여 운송 및 수장고 보관

○ 2018. 8. 29. ~ 9. 6. : 전시유물 해포 및 사진 촬영, 전시 유물 배치

○ 2018. 9. 7. ~  12. 2. : 전시개막 및 전시 운영

○ 2018. 12. 3. ~  12. 7. : 유물포장 및 전시물 철거

○ 2018. 12. 10. ~ 12. 14. : 유물반환 운송

붙임: 2018 국제교류전 개최 계획 1부.  끝.