시  민

문서번호	시설관리과-12851
보존기간	년
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장
이한수	이문성	07/12 천성훈
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

【2017년 북부관내 긴급누수복구 건설폐기물처리용역-1차최종】

2018. 07.

시설관리과

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중에 있는『2017년 북부관내 긴급누수복구 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)』에 대하여 처리물량 증·감이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 심의위원회를 개최하고 심의완료 결과를 보고함.

1. 일 반 현 황

가. 용 역 명 : 2017년 북부관내 긴급누수복구 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

나. 용역개요

- 당  초 : 폐기물운반   680㎥, 폐기물처리 1,443톤

- 변  경 : 폐기물운반 1,369㎥, 폐기물처리 2,697톤

다. 용역기간

- 당  초 : 2017. 04. 26. ~ 2018. 07. 31.

- 변  경 : 2017. 04. 26. ~ 2018. 07. 31.

라. 용 역 비

- 당  초 : 41,584,000원

- 변  경 : 80,465,000원

마. 도 급 자 : ㈜이수환경  대표 김선영

2. 설계금액 변경내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감액	비고
총용역비	41,584,000	80,465,000	중) 38,881,000
공급가액	37,803,637	73,150,000	증) 35,346,363
부 가 세	3,780,363	7,315,000	증) 3,534,637

3. 항목별 게약물량 증·감에 따른 내역

항 목	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감	비 고
1. 폐기물운반
폐아스콘	24톤덤프트럭 (중간집하장~처리장)	㎥	***	***	********
폐콘크리트	24톤덤프트럭 (중간집하장~처리장)	㎥	***	***	*********
폐토석	24톤덤프트럭 (중간집하장~처리장)	㎥	***	***	********
2. 폐기물처리
폐아스콘	중간처리업체	톤	***	*****	********
폐콘크리트	중간처리업체	톤	***	****	********
폐토석	중간처리업체	톤	***	*****	********

4. 심의내용

가. 설계변경의 타다성 여부

나. 계약변동(증·감) 물량 단가적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

※ 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약의 특성상 발생

5. 심의회 개최

가. 심의일시 : 2018. 07. 12(목) 10:00

나. 심이장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 위 원 장 : *************

라. 심 의 자 : ****************************

6. 심의결과

가. 설계변경의 타다성 : 타당함

나. 제경비 적정산정 및 적용 적정성 : 적정

다. 계약변동(증·감) 물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

라. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.