문서번호	시설과-4328
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
허용석	이춘한	07/13 오임석
협 조

동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

감 리 기 한  연 장  검 토  보 고

2018. 7.

서울대공원

(시설과)

동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

감 리 기 한  연 장  검 토  보 고

동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사 감리 기한 부족(공사기한과 상이)으로 인한 감리기한 연장에 따른 검토 보고임

1		관련근거

○ 공사 계약 체결 통보(재무과-25456, 2018.5.25.)

○ 공사 감리 계약 체결 통보(총무과-5032, 2018.5.21.)

2		사업개요

(단위 : 원)

구 분	계 약 명	공사(용역)기간	계약금액	계약업체	사 업 내 용
전기공사	동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사	2018.5.25. ~ 2018.7.23.	168,345,320	㈜동일이엔지	전력간선 4개소 교체 전동기제어반 및 분전반 교체 접지시설 개선
전기공사 감리용역	동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사 감리용역	2018.5.17. ~ 2018.7.15.	15,830,000	㈜유정이엔지	전기공사 감리용역 1식

3		감리기한 연장 검토

○ 동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사와 공사 감리 기한이 상이(감리기한이 8일 부족)하여 공사의 적절 시공을 위해 감리 기한을 15일  연장하고자 함

○ 감리기한 연장 내용

구 분	계 약 명	계약자	용역 기간		비고
			변 경 전	변 경 후
전기공사 감리용역	동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사 감리용역	㈜유정이엔지 대표 유미경	2018.5.17. ~ 2018.7.15.	2018.5.17. ~ 2018.7.30.	15일 연장

○ 지체상금 부과여부: 미부과

○ 감리금액: 변경없음

4		처리의견

○ 공사진행 상황 등 종합적으로 검토한 바 감리 기한을 전기공사 일정에 따라 상기와 같이 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

5		행정사항

○ 용역 변경계약 의뢰.  끝.