투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	난지천공원 록가든 조성공사 설계변경 시행

1. 공원운영과-8781(2018.7.12.)호와 관련입니다.

2. 난지천공원 록가든조성공사 중 현장여건에 따른 물량변경 발생에 대해 아래와 같이 설계 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 난지천공원 록가든 조성공사

나. 위    치 : 난지천공원 유아숲체험장 맞은편

다. 공사기간 : ’18. 6. 28. ~ 7. 22.

라. 공사내용 : 조경석 설치 및 억새류 식재 등

마. 소요예산                                              (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		25,017,980	27,152,980원	증)2,135,000
도급비	공 급 가 액	20,740,910	22,681,819	증)1,940,909
	부가가치세	2,074,090	2,268,181	증)194,091
	계	22,815,000	24,950,000	증)2,135,000
관급자재비		2,202,980	2,202,980	-

바. 계 약 자 : 주식회사 뜨레엔지니어링 대표 이상임

서울특별시 강서구 양천로47길(T: 02-577-6704)

사. 변경사유 : 현장여건에 따른 물량 변경

아. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경생태 테마공원 육성

산하공원운영, 월드컵공원시설물보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 변경설계서 1부.  끝.

주무관	김은희		주무관	류기혁		공원운영과장	배남현		서부공원녹지사업소장	07/13 오진완
협조자	주무관	김선희
시행	공원운영과-8812	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5544	/전송	02-300-5527	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개