위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	총사업비 조정결과 통보

1. 관련문서

가. 중구청 건축과-13016(2018.6.25.)

나. 문화체육관광부 문화기반과-2970(2018.7.10.)호와 관련입니다.

2.「서소문밖 역사유적지 관광자원화 사업」과 관련하여 문화체육관광부로부터 총사업비 조정결과(변경내용 : 사업기간 변경)가 통보되어 알려드립니다.

가. 총사업기간 변경사항

당초 사업기간	조정 요구 사업기간	조정 결과 사업기간
2013. 1 ∼ 2018. 6	2013. 1 ∼ 2018.10 (4개월 연장)	2013. 1 ∼ 2018.12 (6개월 연장)
※ 변경사유 : 관급자재(레미콘) 공급부족에 다른 공사기간 연장

붙임 : 1. 문화체육관광부 공문 1부.

2. 총사업비 조정결과문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정은		지역관광진흥팀장	유형석		관광정책과장	07/13 김재용
협조자
시행	관광정책과-8872	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)