문서번호	시설보수과-5453
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
강연홍		전결 07/13 박병연
협조

- 목동교 외 1개소 보수공사

실정보고에 대한 조치계획 보고

2018. 7.

목동교 외 1개소 보수공사

실정보고에 대한 조치계획

우리 사업소에서 추진중인「목동교 외 1개소 보수공사」와 관련, 감독기관인 서울시설공단으로부터 제출된 현장실정보고 검토결과 보고임.

※관련근거 : 서울시설공단 공사감독1처-4779(2018.07.13.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 목동교 외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2018. 5. 3 ~ 2018. 10. 29

○ 공사규모

- 난간설치 및 연석보수 230m. 교면방수 1,560㎡, 콘크리트 보수공 852㎡

○ 도 급 비 : 405,280,700원

○ 도 급 자 : 케이디에프에스(주) 대표 황욱정

○ 감 독 자 : 서울시설공단

○ 예산현황 : 총공사비 624,124,700원

(도급비 405,280,700원. 관급자재비 178,194,000원. 이전비 40,650,000원)

Ⅱ		실정보고 내용

❏ 서울시설공단

○ 현황 및 문제점

1) 보도부 포장구간 실측에 따른 물량조정 필요

- 오목교 보도구간에 신축이음부, 가로등, 램프접속교 등으로 방수 및 시공물량의 조정이 필요하며,

- 교량보도부와 연결되는 접속보도 구간의 추가 시공이 필요함

보도부 실측(물량조정)	교량접속부 추가물량

- 아스콘포장물량 증가에 따른 관급자재 물량 증가

- 보도포장면 바탕처리시 발생된 탄성포장재 잔재물과 콘크리트가 혼합된 혼합폐기물 처리 필요

공 종	단 위	당 초	변 경	증·감
관급자재
아스콘	ton	186.9	188.9	증) 2
이전비
폐기물 운반비(혼합폐기물)	m3	-	2.9	증) 2.9
폐기물 처리비(혼합폐기물)	ton	-	5.51	증) 5.51

2) 보도구간 공사시행에 따른 신규공종 반영필요

- 보도구간 아스콘 포장시 기존 신축이음부의 물고임을 해소할 수 없어 신축이음부는 아스콘포장 컷팅후 씰링보수 공종 반영

- 영등포방향의 연석부에 배수구멍이 설치되어 있으나 보도구간이 차도보다 2~4cm낮아 도로상의 빗물이 보도로 유입되고 있어 빗물받이가 없는 부분의 연석부 배수구멍은 폐쇄조치 필요

- 보도구간에 설치된 점자블럭이 노후되어 교체 설치 필요

- 오목교 설계시 보도포장이 야간으로 되어있으나 부대공의 교통정리원은 주간만 반영되어 있어 야간공사시 교통정리원(야간) 반영 필요

○ 검토의견(시설공단)

1) 보도부 포장구간 실측에 따른 물량조정

- 현장 실측 수량에 맞도록 물량변경 및 접속구간의 추가포장은 교량과 보도구간의 연속성을 위해 아스콘포장 시행

<물량변경 내역>

공 종	단 위	당 초	변 경	증·감
1. 탄성포장 철거	m2	1,560	1,548	감) 12
2. 아스콘표층 포설 및 다짐	m2	1,560	1,576	증) 16
3. 교면방수	m2	1,560	1,479	감) 81

- 아스콘 포장물량 증가에 따른 관급자재 물량변경 및 발생된 혼합폐기물 처리

<물량변경 내역>

공 종	단 위	당 초	변 경	증·감
관급자재
아스콘	ton	186.9	188.9	증) 2
이전비
폐기물 운반비(혼합폐기물)	m3	-	2.9	증) 2.9
폐기물 처리비(혼합폐기물)	ton	-	5.51	증) 5.51

2) 보도구간 공사시행에 따른 신규공종 반영

- 보도구간 신축이음부는 아스콘포장 컷팅후 씰링보수 실시

- 영등포방향의 도로와 보도경계상 연석부에 설치된 배수구멍은 교량에 빗물받이가 설치된 부분을 제외하고 폐쇄조치

- 기존의 노후 점자블럭 교체 설치

- 야간 포장공사에 따른 교통정리원(야간)은 실정산하여 반영

○ 개략공사비 증•감 : 감)1,864천원(부가세 포함)

Ⅲ		실정보고 검토 및 조치의견

○ 서울시설공단의 실정보고 사항을 검토한 결과

- 오목교 보도구간은 현장실측한 물량으로 변경하고 관급자재 또한 변경조치함이 타당한 것으로 검토되고

- 신규공종 추가 등 실정보고 사항에 대하여서도 타당한 것으로 검토되므로 실정보고 내용과 같이 승인해주고

○ 우선 공사시행후 추후 설계변경시 내역에 반영하여 조치토록 통보코자 함.

첨부 : 관련공문 및 실정보고서 1부.  끝.