투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계 용역 설계변경 시행

1. 시설과-1628(2018.7.13)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 설계 변경하여 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계 용역

나. 도 급 액 : 금105,205,000원(금일억오백이십만오천원)

다. 공사기간 : 2018. 3. 26 ~ 10. 11

라. 도 급 자 : ㈜대한콘설탄트 대표 박광하

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	소 요 금 액			비고
	당 초	변 경	증 / 감
도 급 액	105,205,000	107,440,000	증)2,235,000
공급가액	105,205,000	107,440,000	증)2,235,000
순용역비	94,260,000	96,280,000	증)2,020,000
부 가 세	9,426,000	9,628,000	증)202,000
손해배상공제료	619,000	632,000	증)13,000
자문위원수당	900,000	900,000	0

바. 예산과목 :  푸른도시국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계복원사업, 단절된 녹지축 연결, 시설비(205-401-01)

붙  임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 설계변경 보고서 1부.    끝.

	시설과장
시설관리팀장	장창원		시설과장	07/13 진병규
협조자
시행	시설과-1630	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2181-1152	/전송	8363093	/		/	대시민공개