문서번호	시설과-1628
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설과장	공원운영과장
장창원	진병규	07/13 代김남현
협 조
	경리팀장		곽선아

개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계용역

추가과업 반영에 따른 설계변경 보고

2018. 7

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계용역

추가과업 반영에 따른 설계변경 보고

우리사업소에서 시행중인「개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계용역」에 대하여 기보고한 추가과업(조감도 작성)을 반영하여 설계변경하고자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 개포로 녹지연결로 조성공사 기본 및 실시설계 용역

❍ 공사기간 : 2018. 3. 2 6~ 10. 11

❍ 계약금액 : 105,205,000원

❍ 용역개요 : 녹지연결로 설치(폭20m, 연장 35m)

❍ 도 급 자 : ㈜대한콘설탄트 대표 박광하

Ⅱ		추진현황

❍ 2018. 1. 19. : 개포로 녹지연결로 조성 추진계획 시달(시 자연생태과)

❍ 2018. 3. 26. : 설계용역 착수

❍ 2018. 6. 14. : 설계용역 자문회의 시행

❍ 2018. 7. 11. : 실시설계 변경요청((주)대한콘설탄트)

Ⅲ		변경사항

❍ 추가과업 반영

분야	내 역	용역비(천원)	비고
소계	1 건	증)2,235
추가과업	조감도(A1) 작성 (1식 추가) 1식 ×2,235,000원 = 증)2,235,000원	증)2,235	부가세 및 손해배상공제료 포함

Ⅳ		용역비 변경

❍ 용역금액 변경

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비고
		당 초	변경	증 / 감
총 용 역 비		105,205,000	107,440,000	2,235,000
도급비	소 계	105,205,000	107,440,000	2,235,000
	순 용 역 비	94,260,000	96,280,000	2,020,000
	부 가 세	9,426,000	9,628,000	202,000
	손해배상공제료	619,000	632,000	13,000
	자문위원수당	900,000	900,000	0

□ 예산검토

○ 예산조치사항

(단위 : 원)

총사업비 (재배정액)	사업비 현황		비고
	용역비(도급액)	낙찰차액
120,675,000	105,205,000	15,470,000

‣ 예산과목

- 푸른도시국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계 복원사업, 단절된 녹지축 연결, 시설비(205-401-01)

Ⅴ		조치계획

○ 추가과업 반영에 따른 용역비 증가(2,235천원)은 낙찰차액에서 시행토록하고 설계변경 의뢰 (시설과 → 공원운영과)

붙  임 : 1. 추가과업 검토보고 1부.

2. 설계내역서(변경) 1부.  끝.