문서번호	문화시설과-5679
결재일자	2018.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	문화시설총괄팀장	문화시설과장	문화시설추진단장
김권웅	박정추	오희선	07/16 최홍연

- 세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 –

사업기한 연장 승인 계획

2018. 7.

문화시설추진단

(문화시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	세종문화회관 협의
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□	검토완료
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 –

사업기한 연장 승인 계획

‘블랙박스 극장 조성공사’ 와 관련하여 사업 대행 중인 세종문화회관으로부터 사업계획 변경 등의 사유로 사업기한이 연장(1개월) 승인요청이 있어 검토결과 적정하므로 승인 후 사업추진에 만전을 기하고자함

□ 추진근거

○ 세종문화회관 블랙박스극장 조성 변경계획(문화시설과-3684, ’18.5.4.)

○ 계약금액 및 계약기간 조정계획(세종문화회관 사장방침, ’18.6.2.)

○ 사업 대행계약서 제4조(사업기한)

- 부득이한 사정으로 사업이 지연되는 경우 “시” 의 동의를 얻어 조정가능

□ 그간 추진경위

○ ’12.11. : 예술동 증축공사 준공(실험극장 내부 및 설비 제외)

○ ’16. 2. : 사업계획수립 및 민간대행계약 체결(서울시↔세종문화회관)

○ ’16. 7. ~ ’17. 3. : 기본 및 실시설계

○ ’17. 4. ~ ’17. 5. : 건축심의·협의(종로구), 시공자 선정·계약

○ ’17. 5. : 공사착공

○ ’17.12. : 1회 설계변경 협의(종로구)

○ ’18. 5. : 사업 변경계획 수립(지하철 연결통로 설치계획 제외)

○ ’18. 6. : 2회 설계변경 협의(종로구)

□ 사업개요 및 공사 진행현황

○ 사업개요

- 위    치 : 종로구 세종대로 175 세종문화회관(예술동 지하)

- 기    간 : 2016. 1.~ 2018. 7. (2018.10.개관예정)

- 규    모 : 328석(가변경), 면적 2,724㎥(지하1~지하3층)

- 내    용 : 블랙박스극장 조성(무대, 객석, 대기실, 로비 등)

- 추진방법 : (재)세종문화회관 사업대행

- 총사업비 : 7,574백만원

○ 공사 진행현황(공정률 : 95%)

- 주출입구 창호프레임 설치 및 유리시공

- 내부 마감공사 진행(도장, 전기, 공조설비 등)

- 예술의정원 복구공사 시행

□ 사업기한 연장 계획

○ 승인요청 내용 : 사업기한 연장

당초기한	변경기한	증감	비 고
2018. 7. 31.	2018. 8. 31.	1개월 증가	개관일정 변동 없음

○ 연장사유

- 연결통로 협의지연에 따른 주출입구 공사지연

- 예술의정원 복구 등 추가공사 수행

- 준공 후 하자 zero화를 위한 시설물 안정화 기간 확보 등

※ 변경 일정표

□ 향후계획

○ 사업기한 연장 승인통보      :  즉시시행

○ 공사준공                    :  ’18.  8.

○ 시험운영                    :  ’18.  9.

○ 개관(프로그램 기획 및 운영) :  ’18. 10.

붙임  세종문화회관 공사기간 조정방침 1부.  끝.