문서번호	문화융합경제과-7273
결재일자	2018.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	영상산업팀장	문화융합경제과장
박혜란	박경민	07/16 최판규

- 서울시네마테크(가칭) 건립사업 -

소규모 지하안전영향평가 용역 시행 계획

2018. 7

문화융합경제과

- 서울시네마테크(가칭) 건립사업 -

소규모 지하안전영향평가 용역 시행 계획

서울시네마테크 건립 사업과 관련하여,「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 소규모 지하안전영향평가 용역을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울시네마테크 건립사업 소규모 지하안전영향평가 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 120일

○ ****************

- ***************************************************

○ 주요 과업내용 (※ 붙임 과업내용서 참조)

- 지반·지질 현황, 지하수 변화에 의한 영향 및 지반안전성 검토

- 지하안전 확보방안 수립 등 지하안전영향평가서 작성

- 지하안전영향평가 협의에 필요한 사항 등

	<서울시네마테크(가칭) 건립 사업 개요>
○ 위 치 : 중구 마른내로 38 (중구 초동 공영주차장) ○ 규 모 : 부지 804.1㎡, 연면적 4,894㎡(지하 3층, 지상 10층) ○ 공간구성 : 상영관(4개소), 영상창작 교육실, 아카이브 등 ○ 총사업비 : 22,464백만원 ※ ‘18.7월 현재 설계 중

□ 관련법령 검토결과

○「지하안전관리에 관한 특별법」제23조 및 동법 시행령 제23조에 따라,
「서울시네마테크 건립사업」은 소규모 지하안전영향평가 대상사업

→ 굴착깊이가 10미터 이상 20미터 미만인 굴착공사를 수반하는 사업에 해당

□ 입찰 및 낙찰자 결정방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 자 중 「지하안전관리에 관한 특별법」제25조에 따라 지하안전영향평가 전문기관으로 등록된 업체로서,

- 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 선정절차

입찰공고	⇨	입찰 및 개찰	⇨	적격심사	⇨	낙찰자 선정	⇨	계약 체결

○ 낙찰자 결정

- 예정가격 이하, 낙찰하한율(87.745%) 이상 최저가격으로 입찰한 순으로 적격심사＊하여 종합평점이 95점 이상을 얻은 자를 낙찰자로 결정

*「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행안부 예규 제19호, ‘17.12.) 제3장의 <별표 2>의 ‘5. 추정가격이 1억원 미만인 기술용역의 평가기준’에 의함.

○ 특이사항

- 현장 조사는 기존 설계용역의 지반조사 결과를 활용하되,

- 용역 진행 중 추가로 수행되는 과업이 있을 경우의 비용은「지하안전관리 업무지침」에 따라 추가 반영

- 추가로 현장 조사를 실시할 경우 기존 건물은 철거하지 않고 시행

□ 향후계획

○ ‘18. 7월        : 기술용역 타당성 심사(기술심사담당관)

○ ‘18. 7월~8월   : 입찰 공고 및 계약

○ ‘18. 8월~11월  : 소규모지하안전영향평가 실시 및 협의(국토교통부)

붙임 : 1. 용역원가계산서 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.