문서번호	도로보수과-6500
결재일자	2018.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김경욱		박병연	07/17 김용제
협조

2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제 3차 작업계획 보고

2018. 07.

강서도로사업소

[도로보수과]

제 3차 작업계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 03. 14. ~ 2018. 12. 14.

○ 시 공 사 : 이에스피건설 대표 강 상 수

○ 도 급 비 : 금269,043,410원

□ 보고내용

○ 응답소 민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간
1	경인로, 영등포역 ~ 구로세무서	무단횡단금지시설 기초 제거	276개	√		민원
2	경인로, 영등포역 ~ 구로세무서	무단횡단금지시설 철거	257경간	√		민원
3	경인로, 영등포역 ~ 구로세무서	무단횡단금지시설 재설치	257경간	√		민원
4	신목로, 신정동 867 앞	자전거도로 경계석 정비	1m	√		민원
5	여의서로, 국회 6문 인근 자전거도로	무단횡단금지시설 기초 제거	116개	√		방침서 참고
6	여의서로, 국회 6문 인근 자전거도로	시선유도봉 설치	120개	√		방침서 참고
7	남부순환로, 구로IC 램프구간	경계석 정비(측구 포함)	20m	√
8	남부순환로, 구로IC 램프구간	시선유도봉 살치	40개	√
9	목동중앙로, 월촌초등학교 앞	과속방지턱 설치	1개소	√		2차 작업 보완(24m)
10	경인로, 구로동 구로지하차도 진출입부	차량방호울타리 단절구간 연결	2경간	√		17년 감사 지적사항
11	노들로, 성산대교 남단	차량방호울타리 단절구간 연결	2경간	√		17년 감사 지적사항
12	노들로, 여의2지하차도 진출입부	차량방호울타리 단절구간 연결	4경간	√		17년 감사 지적사항
13	안양천로, 오목교 하부	차량방호울타리 단절구간 연결	2경간	√		17년 감사 지적사항
14	개화동로	철거 차량용 방호울타리 고재처리	8경간	√
15	국회대로, 국회 앞 교차로 자전거도로	시선유도봉 설치	40개	√		2차 작업 보완
16	구로동로, 고대구로병원 앞	무단횡단금지시설 설치	70경간	√		사업소 자재 활용
17	버드나루로 24 앞 중앙분리대 내	시선유도봉 설치	50개	√		우선작업 필요
18	화곡로	시선유도봉 철거 및 설치	50개	√		우선작업 필요
19	오목로, 오목교 진출입 구간	차량방호울타리 철거	60m	√		(신규)
20	경인로, 영등포로터리	장애물 식별표지 설치	10개	√		영등포경찰서 교통과-6974 (신규)
21	여의서로, 국회 6문 인근 자전거도로	자전거도로 마크 설치	10개	√		방침서 참고 (신규)
22	목동로, 진명여고 앞	무단횡단금지시설 기초 제거	60개	√

※추후 현장여건에 따라 지시물량의 경미한 변경 가능

※신규 추가 공종은 설계변경 시 반영하여 정산

□ 조치계획

○ 위 보수대상 시설물을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수(연간단가) 업체에

작업지시하여 보수하고자하며 추후 설계변경 시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제3차 작업지시

- 작업위치 : 경인로(영등포역 앞) 등

- 작업기간 : 2018. 07. 18. ~ 2018. 08. 31.

- 공종 및 물량 :“별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 56,528천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황                                                (단위 : 원)

공 사 명	도 급 비 (A)	기 집행 공사비 (B)	금회사용(3차) (C)	비고(잔액) (A)-[(B)+(C)]
2018년 도로 및 교통안전 부속물시설물 유지보수공사	269,043,410	175,472,000	56,528,819	37,042,591

붙임 1. 작업지시서 및 위치도 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.

3. 여의서로 자전거도로 정비계획 1부.  끝.