문서번호	기전과-3216
결재일자	2018.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
전상은		임태수	07/17 박기범
협조
	주무관		김용문

『2018년 중앙버스전용차로 흐름개선공사』

설 계 변 경  검 토 보 고

2018. 7.

남부도로사업소

( 기 전 과 )

『2018년 중앙버스전용차로 흐름개선공사』

설 계 변 경  검 토 보 고

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선공사(교통신호기)와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 설계변경사항에 대해 아래와 같이 검토하여 보고 드림.

		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제74조

□ 공사실정보고에 대한 검토보고(기전과-2988<‘18. 7. 4.>)

□ 설계변경 제출(책입감리업체–태영(신)2018-30<‘18. 7.13.>)

		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선공사(교통신호기)

□ 공사위치 : 동작구 대방동 15길29(강남중학교 앞)

□ 공사내용 : 교통신호기 신설

□ 계약금액 : 금39,452,100원

□ 계약업체 : ***************

□ 계약기간 : ‘18. 4.17. ~ 7.31.

□ 책임감리업체 : ****************

		설계변경사항

□ 설계변경 사유

◼ 현장여건에 따른 물량변경

연번	당 초	변 경	사 유	증·감 액(원)	비 고
1	- 제어기완성품 물량 ·제어기완성품 (표준형-LTE포함) : 1대 ·제어기완성품 (표준형-LTE제외) : 0대	- 제어기완성품 물량 ·제어기완성품 (표준형-LTE포함) : 0대 ·제어기완성품 (표준형-LTE제외) : 1대	- 신규공종발생 ·LTE모뎀 교통운영과지급	감1,452,540	신규
2	- 신호현시 DB입력 및 종합시험 ·현장과 센터간 : 1식	- 신호현시 DB입력 및 종합시험 ·현장과 센터간 : 0식	- 설계오류 ·신호제어기신설에 포함	감 277,727
3	- 신호제어기 좌대 물량 ·이설 : 1대	- 신호제어기 좌대 물량 ·이설 : 0대	- 설계오류 ·이설물량 없음	감 24,233
4	- 지중방수용 발포지수제 분사처리 물량 ·신설 : 0EA	- 지중방수용 발포지수제 분사처리 물량 ·신설 : 1EA	- 설계누락	증 42,734
5	- 전원선 물량 ·F-CV 6.5Q2C 신설 : 14m	- 전원선 물량 ·F-CV 6.5Q2C 신설 : 12m	- 현장여건고려	감 8,213
6	- 전선관 물량 ·PE54 신설 : 9m PE100 1열 신설 : 0m PE100 2열 신설 : 8m	- 전선관 물량 ·PE54 신설 : 6m PE100 1열 신설 : 12m PE100 2열 신설 : 0m	- 현장여건고려	감 81,002
7	- 소형고압블럭 굴착 물량 ·기계80%+인력20% 신설 : 17m - 경고테이블 물량 300mm*1m 신설 : 44m	- 소형고압블럭 굴착 물량 ·기계80%+인력20% 신설 : 18m - 경고테이블 물량 300mm*1m 신설 : 45m	- 현장여건고려	증 11,588
8	- 신호케이블 물량 지중1선 신설 : 132m 가공1선 신설 : 0m 지중1선 철거 : 0m 가공1선 철거 : 0m 고재 : 0m - 차량신호등 물량 1면 3색 신설 : 0조 보호금구 신설 : 0조 1면 3색 철거 : 0조	- 신호케이블 물량 지중1선 신설 : 181m 가공1선 신설 : 12m 지중1선 철거 : 31m 가공1선 철거 : 12m 고재 : 43m - 차량신호등 물량 1면 3색 신설 : 1조 보호금구 신설 : 1조 1면 3색 철거 : 1조	- 현장여건고려 (육교철거 전 신호등 시인성확보를 위해 육교상부 임시차량등 설치)	증 994,953	신규

◼ 신규 일위대가 적용

내역서 번 호	품 목	규 격	발생 사유	비 고
31-001	차량신호등 설치	LED, 1면3색(사급)	- 임시차량신호등 설치 필요 ▪ 보도육교 철거 전 시인성 확보를 위해 육교 상부 임시차량신호등 설치, ▪ 보도육교 철거와 동시에 차량신호등 철거
31-002	차량신호등용 보호금구 설치	용융아연도금 Ø90㎜×260㎜
31-003	차량신호등 철거	LED,1면2,3,4색 (경보등 포함)
31-004	신호케이블 신설	가공1선 (F-CVV,1.5SQ/5C)
31-005	신호케이블 철거	가공1선 (F-CVV,1.5SQ/5C)
31-006	케이블 고재 (신호선)	1선F-CVV (F-CVV,1.5SQ/5C)
31-007	신호케이블 철거	지중1선 (F-CVV,1.5SQ/5C)
31-008	제어기완성품(표준형)	사급 (통신LTE모뎀 미포함)	- 통신LTE모뎀 관급지급(교통운영과) ▪ 통신LTE모뎀 자재비 및 설치품이 제외된 일위대가 필요 ※ 발주된 일위대가에서 제어기 부분품(LTE MODEM)과 모뎀 설치비 적용제외

◼ 건강, 연금보험료 등 법정보험료 정산 : 감 1,071,106원

□ 설계변경금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공급가액	35,865,546	34,000,000	감 1,865,546
	부가가치세	3,586,554	3,400,000	감 186,554
	합 계	39,452,100	37,400,000	감 2,052,100

□ 책임감리원 기술검토 의견

◼ 실정보고 승인사항을 반영, 설계물량과 실제 현장여건에 따른 공사물량의 증·감에 의한 물량의 차이가 발생하여

◼ 설계변경을 시행함이 타당하다 사료됨.

		보고자의견

□ 책임감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과,

◼	실제 공사물량에 따른 물량 증·감 변경사항으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

		행정사항

□ ‘18. 7.18. : 설계변경계약 의뢰(관리단속과)

□ ‘18. 7.23. : 공사준공

붙  임 : 1. 책임감리원 설계변경 승인요청서 1부.

2. 설계변경 검증확인서 1부.

3. 공사실정보고에 대한 검토 보고 1부.  끝.