문서번호	급수운영과-10971
결재일자	2018.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
김병주		07/17 박희철
협 조

준공기한 연기보고

(역삼동 825-26호, 신설-48)

2018. 7.

강남수도사업소

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치: 강남구 ***********

○ 작업지시: 신설-48

○ 공사개요: 신설(D=50mm, L=6m)

○ 공사기간: 2018. 5. 24. ~ 2018. 6. 1.

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치의 신축공사 지연으로 인하여 수요가로부터 본 급수공사에 대하여 공사기간 연기를 요청한 사항임.

3. 조치의견

○ 상기 보고내용에 의거 현재 작업지시한 공사건에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

․ 당초: 2018. 5. 24. ~ 2018. 6. 1.

․ 변경: 2018. 5. 24. ~ 2018. 9. 30.

○ 지체상금 부과여부: 미부과.  끝.