문서번호	도시철도설비부-6759
결재일자	2018.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	07/17 구자훈
협 조
	신호과장		구봉서

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고

2018. 7.16(월)

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고

국토교통부(철도시설안전과-1737호,´18. 6.26.), 한국교통안전공단

(철도기술처-1194호,´18. 6.26) 및 철도종합시험운행 시행 지침에 의거 9호선

3단계 시설물검증시험을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

❍ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제 13조

❍ 시험기간 : ´18. 6.27. ~ ´18. 7.27(23일간) ※(토.일 제외)

❍ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주) 3단계 개통 준비단]

❍ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[시설물검증시험 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

❍ 시설물검증시험 내용

계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
97	4	5	12	66	10

※ 시험항목은 국토부 철도종합시험운행 시행지침 [별표 2] 시설물검증시험

점검 항목을 준용.

❍ 추진일정

시설물검증시험		시험결과 검토		시정명령통보
´18.6.27~7.27	⇨	´18.7.30~8. 3	⇨	´18. 8. 3	⇨
서울시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전 개시
´18. 8. 6	⇨	´18. 8. 7	⇨	´18.8.10~9.30
서울시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시험 결과

❍ 시운전 일시 : ´18. 7.16(월) 11:00 ~ 16:45

- 급전(10:27)      - 단전(16:53)

❍ 시설물검증 시험항목 추진 실적

구 분	계	선로	전철전력	신호	관제
					TTC	SCADA
계획	97	4	5	12	66	10
실적	68 (70%)	4	5	11	48	-

※ 신호 6량 정위치정차는 7.27(금)까지 추진

※ 관제(TTC 통신) 열차무선시스템 7.18(수)까지 추진

※ SCADA는 7.25(수)까지 추진

※ 관제(TTC 신호) 7.25(수) 새벽 시행예정,

❍ 금일 시험결과

- 신호 1개 항목 이상없음(계속추진)

- 통신 3개 항목 이상없음(계속추진)

- 관제설비 1개 항목 이상없음

- SCADA 12개 항목 계속추진

❍ 시험내용

- 신호(6량 정위치 정차시험)

↳ 각 역의 정위치 정차 지점에서 정확하게 정차하는지 확인하는 시험임.

- 통신(열차무선시스템)

↳ · 관제 운용조작반에서 시험용 열차를 개별 호출하여 상호 통화를 확인하고,

휴대국에서 비상호출을 하고 관제에서 응답했을 때, 타 휴대국에서도

통화가 되는지 확인하며, 관제 조작반에서 설비장애 및 통신차단시

경보 기능을 확인하는 시험임.

· 또한 전원 이중화 구성이 되어 있는지 확인하는 시험임.

- 관제설비(소방연동시험)

↳ · 화재자동탐지설비에서 임의의 구역에 화재를 발생시킨 후 관제센터에서

화재자동탐지설비 연동이 되는지 그리고 경보도 표출되는지 확인하는 시험임.

- SCADA 설비 기능시험-새벽(시운전 전동차 운행 없음)

↳  · 관제에서 3단계의 전력설비를 원격으로 제어 및 감시가 되는지 설비에 대한

기능 및 성능을 확인하는 시험임.

❍ 투입(탑승)인원 : (월요일) 23명 / (누계) 217명

투입일	서울시	철도운영자	감리 및 시공사	교통안전공단
‘18.7.16(월)	1명	2명	12명	1명

❍ 투입차량

투입일	투입편성수	주 박	기관사	운행횟수	정위치정차
‘18.7.16(월)	6량 1편성 (939편성)	931역 부근	7명	6회	이상없음

Ⅲ		명 일 계 획

❍ 시운전일시

- 주  간 : ´18. 7.17(화) 09:30 ~ 17:00

- 새  벽 : ´18. 7.17(화) 01:30 ~ 04:00

❍ 시험 항목

- 신호 1개 항목 시험

- 통신 3개 항목 시험

- SCADA 12개 항목 추진(새벽, 7/11~7.25까지 추진)

❍ 시험내용

- 신호(6량 정위치 정차시험)

↳ 각 역의 정위치 정차 지점에서 정확하게 정차하는지 확인하는 시험임.

- 통신(열차무선시스템)

↳ · 관제 운용조작반에서 시험용 열차를 개별 호출하여 상호 통화를 확인하고,

휴대국에서 비상호출을 하고 관제에서 응답했을 때, 타 휴대국에서도

통화가 되는지 확인하며, 관제 조작반에서 설비장애 및 통신차단시

경보 기능을 확인하는 시험임.

· 또한 전원 이중화 구성이 되어 있는지 확인하는 시험임.

- SCADA 설비 기능시험-새벽(시운전 전동차 운행 없음)

↳  · 관제에서 3단계의 전력설비를 원격으로 제어 및 감시가 되는지 설비에 대한

기능 및 성능을 확인하는 시험임.

❍ 시험열차 투입

- 주 간 : 6량 1편성(2단계 열차 및 기관사)

❍ 투입(탑승)인원

- 주 간 : 서울시 1명, 철도운영자 1명, 기관사 2명, 감리 및

시공사 등 6명

붙 임 1. 시설물검증시험일지(신호) 1부 .

2. 시설물검증시험일지(통신) 1부 .

3. 시설물검증시험일지(관제설비) 1부 .

4. 시설물검증시험일지(SCADA) 1부 .

5. 시설물검증시험 결과 현황 1부.

6.  시설물검증시험 일정표 1부.  끝.