문서번호	방재시설부-9292
결재일자	2018.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	07/17 이임섭
협조

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

유입수문 지장물(전기 및 제어선로) 이설 검토보고

2018. 07.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

유입수문 지장물(전기 및 제어선로) 이설 검토보고

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 관련 유입수문용 지장물(전기 및 제어선로) 이설에 대한 처리방안을 보고드림.

※ 근거 : 중랑 감 제18-155호(2018. 7. 5.)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=412,000㎥/일

○ 공사기간 : 총괄 2017. 9.13. ~ 2019.11.12.

1차  2017. 9.13. ~ 2018. 8.30.

○ 계약금액 : 총괄 16,339백만원(1차 13,336백만원)

○ 시 공 사 : 엘림토건㈜ 외 2

○ 관 리 단 : ㈜천일 외 3

Ⅱ		현 황

○ 유입수문용 지장물(전기 및 제어선로)이 설치 예정인 총인처리시설 내 매설되어 있어 이설 필요

Ⅲ		검 토 내 용

○ 유입수문 지장물(전기 및 제어선로)

- 지장물 : N=8공(∅150㎜), L=74, 전신주 1EA

- 위  치 : 총인처리시설 중앙부에 매설

- 이  설 : 장소 협소하여 전주를 이용한 우회 인접도로 이설 필요

○ 기존 및 이설 현황

- 파상형 경질폴리에틸렌전선관(∅100㎜) : L=100m

- 파상형 경질폴리에틸렌전선관(∅80㎜) : L=230m

- 전신주 신설 : 1EA  등

○ 공사비

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
전기 및 제어선로	-	49,357천원	증)49,357천원

Ⅳ		검 토 의 견

<책임건설사업관리기술자>

○ 검토 결과 총인처리시설 작업이 진행 중에 있어 공사 시행에 지장 없도록 유입수문용 지장물(전기 및 제어선로)을 이설하여 공정이 차질이 없도록 우선 시행토록 하고 추후 설계변경 시 반영코자 함.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되어 추후 설계변경 처리토록 통보코자 함.

붙임  책임건설사업관리기술자 검토의견서 등 각 1부. 끝.