문서번호	도로보수과-6537
결재일자	2018.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
박성근		박병연	07/18 김용제
협조

2018년 주행유도선 확대설치에 따른 노면표시 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 주행유도선 확대설치에 따른

노면표시 시행계획 보고

2018년 주행유도선 확대설치에 따른 사업예산이 재배정되어   시행계획을 보고드림.

□ 추진근거

○ 2018년 주행유도선 확대설치 예산(시민참여) 재배정 통보

【교통운영과-10846호(2018.07.02.)】

○ 2018년 주행유도선 확대설치 관련 노면표시 설치요청

【교통운영과-11736호(2018.07.16.)】

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 주행유도선 확대설치 사업(시민참여)

○ 위    치 : 영등포구 양평동 사거리외 8개소

○ 사 업 비 : 20,000천원

○ 예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 주행유도선 확대설치, 시설비(401-01)

□ 세부내용

○ 영등포구 양평동 사거리외 8개소

- 사 업 비 : 20,000천원

- 개선내용 : 노면표시(주행유도선) 제거 및 도색

▸차선도색 L=5,600m, 차선제거 L=48m, 차로밑그림 L=5,600m

- 사업구간 도면 : 붙임참조

- 예산 배정 및 계약내역서 현황

예산 배정금액	노면표시 연간단가 (계약내역서)	잔여금액(차액)	비 고
20,000천원	14,114천원 - 도급비 9,009천원 관급비 5,105천원	감) 5,886천원	설계서(구간표-물량)를 『2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』계약단가로 반영한 결과, 단가 차이로 인한 예산 잔여금액 발생

□ 현황 및 보고내용

○ 2018년 주행유도선 확대설치 사업(시민참여)의 설치 요청기간은 ‘18.7.23~8.17일로 공사일정에 따라 긴급시행이 요구됨.

○ 본 사업을 별도 발주시 약 1.5개월의 사전절차(설계~공사착공)가 소요되어, 행정행위 기간동안 작업시행에 어려움이 있음.

□ 조치계획

○ 일정에 따른 긴급 작업을 위해 현재 시행중에 있는『교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 본 사업비를 반영하여 시행하고자 하며, 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

○ 관급자재 사용검토

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 기 납품 계약된 업체에 수량을 변경(증)하여 사용하고 추후 정산.

□ 향후계획

○ 2018. 07.~08. : 작업지시 및 공사시행

○ 2018. 09.~12. : 결과보고 및 정산시행

붙 임  1. 예산재배정 및 설치 요청 공문  각 1부.

2. 노면표시 내역서(계약단가) 및 설계도면 각 1부.  끝.