문서번호	시설과-1663
결재일자	2018.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
최종성		송복식	07/18 진병규
협조

『보라매공원 유아숲 체험장 조성공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2018. 7.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『보라매공원 유아숲 체험장 조성공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보라매공원 유아숲 체험장 조성공사」에 필요한 관급자재의 납품기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 유아숲 체험장 조성공사

○ 공사기간 : 2018. 06. 18 ~ 08. 16

○ 도 급 액 : 금134,662,000원

○ 도 급 자 : ㈜ 현우그린 대표 남상준

○ 공사내용 : 유아숲 체험장 조성 등

□ 관급자재 현황

○ 건 명 : 보라매공원 유아숲 체험장 조성공사 관급자재 구매

○ 관급자재

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
23078673	안내판	300x1,800	개	2
22757940	안내판	1,500x1,000	개	2
22478649	안내판	650x650	개	2
22781815	안내판	750x450	개	6
22846939	안내판	600x270	개	4
22857269	안내판	600x120	개	1
23034087	평의자	1,600x625x555	개	4

□ 검토내용

○ 연기사유 : 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

○ 납품기한 변경

- 당  초 : 2018. 7. 23(안내판), 2018.7.27.(평의자)

- 변  경 : 2018. 8. 16

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

○ 계약부서(공원운영과)로 관급자재 납품기한 연기 요청하고자 함. 끝.