위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사)

1. 재무과-31086(18.07.02) 및 자전거정책과-7235(18.07.18)호  관련입니다.

2. 우리부서에서 수행중인『종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사』에 대하여 다음과     같이 준공기한을 연기하고자 외뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 변경내용

용 역 명	로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사
계 약 자	㈜치산치수 대 표 : 박 흥 자
계약금액	일금11,430,000원(일천일백사십삼만원)
변경내역 (준공기한)	당 초	변 경
	2018.06.29. ~ 2018.07.18	2018.06.29. ~ 2018.07.28

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한연기 보고(연기의뢰서) 1부. 끝

	자전거정책과장
주무관	김영수		자전거시설팀장	한정환		자전거정책과장	07/18 김미정
협조자
시행	자전거정책과-7236	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동7층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2767	/전송	02-2133-1057	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개