문서번호	자전거정책과-7235
결재일자	2018.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장
김영수		한정환	07/18 김미정
협조

『종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사』

준공기한 연기보고

2018. 07.

도시교통본부

(자전거정책과)

『종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사』

준공기한 연기보고

『종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사』시행중『종로4가 교차로 P턴구간 시설보완계획』에 따른 시공물량의 증가사유 발생으로 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사

○ 도  급  자 : ㈜치산치수 대표 박 흥 자

○ 계약금액 : 금 11,430,000원(금일천일백사십삼만원)

○ 계약년월일 : 2018. 6. 29.

○ 착수년월일 : 2018. 6. 29.

○ 준공예정일 : 2018. 7. 18.

○ 공 사 개 요

- 차선도색 2개소 및 조업주차공간 설치 1면(4m×8m)

- 수목제거(은행나무 1주) 및 초화류 굴취 등

Ⅱ		공사 준공기간 연장

□ 연장사유

○ 종로 자전거전용차로 시설보완 계획 보고(자전거정책과-6922,18.07.06)

에 따른 시공물량 증가사유 발생

- 종로4사 P턴구간 보도 턱낮춤 및 녹지대 정비 1식

- 종로4가 교차로 자전거도로 교차로횡단 노면표시 및 유색포장

○ 종로 자전거전용차로 시설보완 계획에 따라 공사시행에 만전을 기하기 위하여 공사 준공기한을 연장하고자 함.

□ 연장방안

○ 공사기간 연장 : 10일 연장

- 당 초 : ’18. 6.29~’18. 7.18

- 변 경 : ’18. 6.29~’18. 7.28

○ 귀책사유 : 우리시(지체상금은 미부과)

○ 계약금액 : 변경없음

Ⅲ		향후 추진일정

○ 종로 자전거전용차로 시설보완 계획 보고(자전거정책과-6922,18.07.06)에 따른 공사시행 및 설계변경 반영과 준공기한 연기조치.

- 준공기한 연기의뢰 : 자전거정책과→재무과

○ 종로 자전거전용차로 시설보완으로 자전거주행환경 개선 및 안전사고 예방. 끝.