문서번호	교량안전과-12809
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		정회평	07/19 한유석
협조

『잠실대교 보수공사』

감리 실정보고서 검토 보고

2018. 7.

안전총괄본부

(교량안전과)

『잠실대교 보수공사』

감리 실정보고서 검토 보고

잠실대교 보수공사 추진중 감리단 실정보고 사항이 있어 내용을 검토하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 잠실대교 보수공사

○ 공사기간 : 2018. 5. 24. ~ 2018. 11. 19.

○ 공사개요

- 교면포장 71.6a, 교면방수 71.6a, 바닥판 보수 27㎡

○ 총공사비 : 775,423천원

- 도급비 : 610,373천원, 관급자재비 : 131,130천원, 이전비(폐기물) : 33,920천원

○ 도 급 자 : 덕우건설㈜ 대표 박봉덕

Ⅱ		감리단 보고내용

○ 관련문서 : 감리단 실정보고 1종교량 제2018-254호(2018.07.12.)

○ 보고내용 : 아스콘 포장 및 방수면적 증가

- 도로의 포장상태를 조사한 결과 설계구간 외에 균열 및 소성변형 발생 구간이 증가하여 안전사고 예방 및 구조물의 내구성 증진을 위해 추가로 정비가 필요한 상태임.

· 북단 Ramp-H구간(잠실대교⇒강변북로 구리방면), A=5.53a

당 초	변 경
	추가포장 A=5.53a

- 정밀점검(2018년) 조사결과

· Ramp-H 초입부 및 본교 확폭구간에 걸쳐 아스콘 망상균열 및 일부 아스콘 패임, 보수부 소성변형 등의 손상이 발생된 것으로 조사됨

· 기 정밀점검(2016년)과 비교 및 분석한 결과, 손상규모 및 물량이 공용기간의 증가에 따라 전체적으로 증가된 양상을 보임

포트홀 발생	균열 발생

- 물량 증가 현황

공 종	당 초	변 경	증·감
교면절삭 및 포장	71.6a	77.13a	증	5.53a
교면방수(구스톤)	71.6a	77.13a	증	5.53a
바닥판(상판) 보수	27㎡	72㎡	증	45㎡

○ 공사비 증·감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	610,373	662,510	증	52,137
관급비	131,130	144,260	증	13,130
이전비(폐기물처리비)	33,920	36,620	증	2,700
총공사비	775,423	843,390	증	67,967

Ⅲ		검토의견

○ 실정보고 내용을 검토한 결과 포장 상태 불량 구간은 감리단 의견과 같이 추가로 정비함이 적정한 것으로 판단되므로

- 실정보고 사항을 승인하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

- 감리단에 승인내용을 통보하여 변경 시행토록 하고, 통행차량(시민) 안전사고 예방 및 신속 추진을 위해 선 시공 후 설계변경 시 반영코자 함.

○ 신규 공종발생 및 물량변경 등으로 증가(67,967천원)되는 공사비는 동 공사의 낙찰차액(99,977천원)을 활용코자 함.

따로 붙임 : 1. 공사책임감리 보고서 1부

2. 정밀점검 조사 결과 1부

3. 변경내역서 1부.  끝.